투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 계약 변경 의뢰(탄천물재생센터 총인처리시설 수문)

우리 본부에서 시행 중인「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사」에 소요되는 관급자재(2단계 경쟁품목)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기 내용

품 명	계약번호 (구매관리번호)	계약자	수량	계약금액 (변경없음)	납품 기한		비고
					당 초	변 경
수문	00168308816 [121821920000]	㈜신정기공	1식	247,715,100원	‘18.12.31	‘19.08.31

나. 연기사유 : 선행공정(토목공사) 지연으로 납품시기 조정

다. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임문서 1) 납품기한 연기 검토 보고. 1부.

2) 합의각서 각 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	김도형		환경설비과장	여인웅		설비부장	11/30 권오식
협조자	경리과장	代김용범
시행	설비부-16488	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8619	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)