시의원 요구자료 제출

시 행	총무부-8270
보존기간	년
결재일자	2018.12.3.
공개여부	부분공개(6)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		경리과장	총무부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
김용범		代김용범	정진일	이택근	12/03 한제현
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1251번, 문장길 의원, 도시안전건설위원회)

시의회 도시안전건설위원회 문장길 의원(더불어민주당, 강서구 제2선거구) 요구자료를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임  시의원 요구자료 1부

문장길 의원(도시안전건설위원회, 더불어민주당)

【 도시기반시설본부 】

1. 지난 5년간(2013~17년) 공사 준공 지연, 납품 기한 미 준수에 따른 지체상금 내역

□ 도시기반시설본부(시설국) 소관 2013년~2017년 기간중 시설공사 지체상금 부과내역을 아래와 같이 제출합니다.

(단위:천원)

연번	부과 연도	계약명	계약금액	준공 예정일	준공일	지체 일수	지체상금징 수 액	지체사유
1	2016	시립영보정신요양원 증축 및 리모델링공사 1차	970,559	`16.10.17	`16.11.10	24	23,293	업체사정준공지연
2	2016	암사대교 건설공사 16차	3,163,000	`16.08.31	`16.11.30	91	229,914	업체사정준공지연
3	2017	서울소방행정타운 건립공사 1차	10,251,790	`17.06.17	`17.07.10	8	41,006	업체사정준공지연
4	2017	성동소방서 신축공사 2차	2,745,270	`17.01.24	`17.06.28	155	79,355	업체사정준공지연
5	2017	홍릉바이오 의료 R&D 앵커조성공사 1단계 2차	1,394,734	`17.08.19	`17.09.06	18	12,551	업체사정준공지연
6	2017	서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사 2차	2,413,200	‘16.12.09	‘17.02.22	75	90,495	업체사정준공지연

끝.

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 도시기반시설본부 (총무부)	담당사무관	이현숙
	☎3708-2374	주무관	김용범
	작 성 일 : 2018. 11.

이곳에 본문을 입력하세요