시  민

문서번호	급수운영과-24252
보존기간	년
결재일자	2018.12.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
황중연	강동길	12/03 代이경희
협 조

설계변경(제3회) 검토 보고

(2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

2018. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경(제3회) 검토 보고

「2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사」업무수행 중 현장여건 및 현장에 적합한 시공으로 인한 계약물량이 증․감됨에 따라 아래와 같이 설계변경(제3회)을 시행코자 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가)

○ 공사기간 : 2018. 3. 23. ~ 2019. 6. 30.

○ 수 급 자 : 엄다종합건설㈜  대표 심영숙

○ 계약금액 : 2,196,056,900원

○ 공사개요

구 분	계	아스팔트 포 장	콘크리트 포 장	보도블록 포 장	비고
수 량	413a	361a	24a	28a

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□ 설계변경금액 및 주요 설계변경 사유

○ 차수별 계약금액 변경(총계약금액:2,196,056,900원)   (단위:원)

구 분	계 약 금 액				증 ․ 감
	당 초		변 경
	1차수	2차수	1차수	2차수	1차수	2차수
공급가액	1,314,930,000	681,485,364	1,860,384,546	136,030,818	증)545,454,546	감)545,454,546
부가가치세	131,493,000	68,148,536	186,038,454	13,603,082	증) 54,545,454	감) 54,545,454
도 급 비	1,446,423,000	749,633,900	2,046,423,000	149,633,900	증)600,000,000	감)600,000,000
계	2,196,056,900		2,196,056,900		총 도급비 증 ․ 감 없음

○ 설계변경 금액                                      (단위:원)

구 분	계 약 금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
총 부기금액	2,196,056,900	2,196,056,900	-	변경없음
1차수 금액	2,046,423,000	2,046,423,000	-	“
2차수 금액	149,633,900	149,633,900	-	“

○ 주요 설계변경 사유

- 현장에 적합한 시공 등으로 인한 포장복구 계약물량 증 ․ 감 발생

구 분	계 약 금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
아스팔트 포장	361.0 a	336.0 a	감)25.0
콘크리트 포장	24.0 a	19.0 a	감) 5.0
보도블럭 포장	28.0 a	18.0 a	증)10.0

- 물량증가 : ASP포장절단(100~150㎜) 외 43종

- 물량감소 : 토사절취(지세) 외 29종

□ 조치계획

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 설계변경 계약의뢰 추진

- 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 자체 「설계변경 심의위원회」 사전 심의를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경을 시행(계약금액 조정)코자 함.

※ 근거 : 계약심사과-227(2009.1.20.)호 「’09년 소규모 상수도공사 설계심사 추진계획」

붙 임  1. 설계변경 사전심의 요청서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.