투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	"2018년 동물사 실내공기질 개선 전기공사" 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

1. 시설과-7487(2018.12.3.)호와 관련입니다.

2. 우리 대공원에서 시행중인 “2018년 동물사 실내공기질 개선 전기공사”에 대해  다음과 같이 준공기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용

연번	계약건명	계약자	준공기한		비 고
			변 경 전	변 경 후
1	2018년 동물사 실내공기질 개선 전기공사	************	2018.11.6. ~ 2019.1.4.	2018.11.6. ~ 2019.5.31	147일연장

나. 준공기한 연기사유

1) 본 공사일정 연기에 따른 해당 전기공사 연장이 필요

다. 지체상금 부과대상 : 미부과

라. 공사금액 : 변경없음

붙임  1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	관리부장
★주무관	김병수		주무관	이춘한		시설과장	代이춘한		관리부장	전결 12/03 심상원
협조자	주무관	정한성
시행	시설과-7512	(	2018.12.3.	)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)서울대공원 관리사무실	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7436	/전송	02-507-7230	/	kbs123@seoul.go.kr	/	비공개