＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	암사정수센터 배출수처리시설 건설사업관리단 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	암사정수센터 배출수시설 증설 현장 건설사업관리자(전기) 배치일정 변경승인

1. 암사정-CM-18-64(2018.11.16.), 기전설비과-7027(2018.11.23.), 암사정-CM-18-83(2018.11.29.)호와 관련한 배슬러지지 증설부지 지장물 이설 관련입니다.

2. 본 공사와 관련 건설사업관리단으로부터 요청한 상주건설사업관리기술자 배치일정을 아래와 같이 변경 승인하오니 공정관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

- 건설사업관리기술자 배치일정 조정 내용 -

구 분	분 야	당초 배치 일정	변경 배치 일정	비고
상주	전기	'18.11.1.∼'18.11.30 (1개월)	'18.11.1.∼'18.12.14 (1.5개월)
		'19.9.1.∼'20.1.25 (4.8개월)	'19.9.15.∼'20.1.25 (4.3개월)

※ 배치일정 조정 사유 : 배슬러지지 신설부지 지장물 이설 완료시점 까지 투입

‘끝’.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김영준		기전설비과장	조성태		생산부장	12/03 유성종
협조자	주무관	최이영		시설과장	송병욱
시행	기전설비과-9254	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1332	/전송	3146-5691	/	myspace@seoul.go.kr	/	대시민공개