문서번호	도시철도설비부-11365
결재일자	2018.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
박지영		이덕한	12/04 代이덕한
협조

- 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(전기) - 설계변경(전기분야) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12

도시시반시설본부

(도시철도설비부)

- 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(전기) 관련 -

설계변경(전기분야) 검토 보고

지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(전기) 설계변경 자문위원회 심의결과 지적사항 조치결과 및 설계변경에 대하여 검토하고 보고 드림

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사

○ 시 공 사 : ㈜포스코건설 외 1개사

○ 사업기간 : 2009.12.31 ～ 2018.12.31

○ 계약금액 : 176,687백만원(전기 9,586백만원)

□ 관련근거

○ 유신감(921)18-853(2018.11.29.)호“921공구 설계변경 자문(소)위원회 심의 결과 지적사항 조치결과 보고”

□ 설계변경내용

○ 사업비 변경(전기)

구 분		공사금액(원)			비 고
		변경전	변경후	증 ‧ 감
전기	합 계	10,300,300,374	10,185,681,609	-114,618,765
	10차	10,300,300,374	10,185,681,609	-114,618,765

○ 주요 설계변경 내용

연번	설계변경 내용	증․감액(원)	비 고
1	터널비상콘센트 수량 변경	-45,261,479	자문결과 감액반영 (-1,564,357원)
2	변압기2차측 간선변경(케이블→bus duct)	18,983,602
3	신호용 변압기 삭제(935정거장)	-80,308,869
4	승강장 축소(8량→6량)	-52,989,377	자문결과 감액반영 (-2,523,066원)
5	UPS용량변경(30KW→5KW)	-319,906,695
6	수배전반 내진대책 반영	80,126,092
7	분전반 도어 도색	7,790,037
8	이동통신 설비용량 증설	24,151,251
9	환기휀 기동장치 보완	136,241,756
10	수익시설 확충에 따른 전기설비 설치	15,600,622
11	지하부 역구내 터널등 추가	33,558,993
12	출입구 등기구 추가	16,678,773
13	철도시설물 기술기준 적용	23,227,825
14	풀박스 용융도금	27,488,704
	계	-114,618,765

□ 향후 조치계획

○ 전기부분 설계변경 내용을 관련부서인 도시철도계획부, 도시철도토목부에 통보

따로붙임 :	1. 설계변경내역서 1부(별도 송부)
	2. 921공구 설계변경 자문(소)위원회 심의결과 지적사항 조치결과 보고 1부. 끝.