문서번호	급수운영과-24347
결재일자	2018.12.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
황중연		강동길	12/04 이성환
협조

설계변경 (제3회) 심의 결과보고

2018. 12. 04.

설계변경(제3회) 심의 결과 보고

「2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사」시행 중 현장여건 및 현장에 적합한 시공으로 인한 계약물량이 증․감됨에 따른 설계변경(제3회) 심의를 마치고 그 결과를 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가)

○ 공사기간 : 2018. 3. 23. ~ 2019. 6. 30.

○ 수 급 자 : 엄다종합건설㈜  대표 심영숙

○ 계약금액 : 2,196,056,900원

○ 공사개요

구 분	계	아스팔트 포 장	콘크리트 포 장	보도블록 포 장	비고
수 량	413a	361a	24a	28a

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일 시 : 2018. 12. 4.(화)  10:00

○ 장 소 : 남부수도사업소 급수운영과(3층)

○ 심의내용 : 계약물량 증․감사항 심의

○ 참석위원 : 위원장 급수운영과장외 심의위원 3명(시설관리과)

간사 및 입회자 1명

□ 심의위원회 검토 내용

○ 설계변경 타당성 : 타당

○ 계약변동물량 적정 여부 : 적정

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

□ 설계변경금액 및 주요 설계변경 사유

○ 설계변경 금액

구 분	계 약 금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
총 부기금액	2,196,056,900	2,196,056,900	-	변동없음
1차수 금액	2,046,423,000	2,046,423,000	-	변동없음
2차수 금액	149,633,900	149,633,900	-	변동없음

○ 주요 설계변경 사유

- 현장에 적합한 시공 등으로 인한 포장복구 계약물량 증 ․ 감 발생

구 분	당 초		변 경		비 고
아스팔트 포장	361.0	a	336.0	a	감)	-25.0	a
콘크리트 포장	24.0	a	19.0	a	감)	-5.0	a
보도블럭 포장	28.0	a	18.0	a	감)	-10.0	a

- 물량증가 : ASP포장절단(100~150㎜)외 43종

- 물량감소 : 토사절취(지세)외 29종

□ 조치계획

○ 설계변경 심의위원회 개최결과 적정하게 설계변경된 것으로 심의된 바,

설계변경 시행코자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 심의 의결서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.