문서번호	급수운영과-18830
결재일자	2018.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
박홍		박희철	12/04 최규해
협조

“명품 아리수, 명품 강남수도”

1구간 타절 및 인입관 미연결 보고 (**************************)

2018. 12

강남수도사업소

(급수운영과)

1구간 타절 및 인입관 미연결 보고

『***************************』 와 관련  1구간 미 시행 타절 및 2, 4구간 인입관 미연결로 준공 처리하고자 합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : **************************

- 위   치 : **********************

- 규   모 : ***********************************

- 기   간 : ****************************

- 총공사비 : ********

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
*********	*******	*******	*******	*********** **********

- 시 공 사 : *******************

- 공사감독 : 서울시설공단(공사감독2처) 최호진

- 공 정 률 :****************************

4구간 D200mm, L=293m

(일원동 642-11~663-4)

타절구간

완료구간

3구간 D300mm, L=645m

(신사동 537-7~530-2)

2구간 D300mm, L=585m

(압구정동 611~664-6)

1구간 D300mm, L=110m

(압구정동 438~611)

□  문 제 점

○ 상기 공사는 *************************와 같은 수계로 강남구 압구정동, 신사동에 안정적인 급수를 위해서는 송배수관 정비공사 선행시공 후 주배관 연결공사가 이루어져야 함.

○ 상기 송배수관 정비공사는 공사현장 교통사고 및 지장물로 인한 강관압입시공으로 공정이 지연되어 현재 준공기한 연기까지 진행된 상태임.

○ 위 와 같은 상황으로 상기 배급수관 정비공사는 1구간 배수관 공사 및 2,4구간 인입관 연결공사가 미시행되어 겨울철 도로굴착 통제에 의해 굴착이 불가한 사항임.

□ 검토결과

○ 상기와 같이 공정 수행이 어려운 공사에 대해서는 ************** ******과 사전 협의를 완료하고 공정 변경에 대한 합의서를 징수하여 준공처리

○ “신의와 성실의 원칙”에 따라 계약금액을 구성하는 물량 확보를 위해 노력하였으나 상기와 같은 사항으로 인한 절대공기가 부족하여 1구간

미시행 및 2,4구간 인입관 미연결을 제외한 준공처리

☞ 관련법규 : (계약예규) 공사계약일반조건 제1조(총칙) 계약담당공무원과 계약상대자는 공사도급표준계약서(이하 “계약서”라 한다)에 기재한 공사의 도급계약에 관하여 제3조에 의한 계약문서에 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다.

○ 공정변경 내역

구 분	시공 내역		개량공사금액	비고
	배수관 연장	인인관개소
***	******	****	******
***	******	****	******
**	*******	*******	********

□ 행정사항

○ 시설관리공단 및 계약상대자

- 위와 같이 합의된 사항을 서울시설공단 및 계약상대자에게 통보하고, 향후 설계변경시 반영토록 조치.

☞ 관련법규 : (계약예규) 공사계약일반조건 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) ①계약담당공무원은 다음 각호의 어느 하나의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다. 3. 공정계획의 변경

○ 인입관 연결공사는 2018년에 계약된 강남구관내 장기계속단가 업체에 작업지시

붙임 :  합의서 1부.  끝.