문서번호	토목부-20412
결재일자	2018.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		명경출	12/04 김영수
협조
	주무관		박운용

토사운반 관리시스템 운영비 반영 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12

도시기반시설본부

(토 목 부)

토사운반 관리시스템 운영비 반영 검토보고

-강남순환도시고속도로(4공구)-

본 공사 사토처리에 대한 관리업무 효율성 증대, 투명한 건설행정을 이행하고자 우리 본부에서 추진중인 “사토 및 폐기물운반관리시스템”을 반영함을 검토보고 드림.

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  총사업비 : 3,580억원(도급비 1,984억원)

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11.30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜/㈜서영엔지니어링

건설사업관리단 검토의견

❍ 도시기반시설본부장 방침『사토 및 폐기물 운반 관리시스템 도입보고(토목부-6215, 2017-03-27)』에 따라 당 현장의 금하지하차도 등 사토 운반시 시스템을 적용 하고자 하는 도급사 롯데건설(주) 현장대리인의 실정보고 수량 및 공사금액에 대하여 감리단의 검토결과 적정한 것으로 사료됨.

❍ 추후 발생되는 사토장 운반거리 변경에 따른 스마트송장 관리시스템 운영비 적용은 당 실정보고 적용방법과 동일하게 적용 예정이며,

❍ 변경 적용된 공사비는 추후 설계 변경시 정산하여 반영 하고자 함.

검토내용

❍ 사토운반 시스템 개요

- 차량 운행 기사 스마트폰 앱 실행 → 상차지 차량 운행시 자동인식→

운행경로를 GPS로 자동 기록 → 하차지 차량 도착시 자동 인식

❍ 수량증감

공 종	단위	당초	변경	증감
스마트 송장	식	-	1	1

- 사토 반영수량 (시행 기준일 : 2017년 9월 9일)

(단위:㎥)

연번	공 종	규 격	전 체	기반출	반영수량
금하지하차도
1	사토처리1(수도권매립지)	토사,L=42.597km	-	-	-
2	사토처리2(시흥시 장곡동 53-5)	토사,L=18.540km	6,000	1,000	5,000
3	사토처리9(영석산업개발(주),골재장)	토사,L=23.600km	7,509	-	7,509
4	사토처리10(송도국제도시 11-2공구)	토사,L=28.200km	20,000	5,372	-
5	사토처리10-1(송도국제도시 11-2공구)	토사,L=28.200km	34,590	-	34,590
6	사토처리11(서울대학교 시흥캠퍼스)	토사,L=24.500km	2,000	-	2,000
7	사토처리12(인천신항 항만배후단지)	토사,L=35.800km	69,079	-	69,079
8	사토처리1(수도권매립지)	풍화암,L=42.597km	648	-	648
9	사토처리1(수도권매립지)	연암,L=42.597km	1,029	-	1,029
박미지하차도
10	사토처리1(수도권매립지)	연암,L=42.597km	4,158	-	4,158
합 계					124,013

❍ 단가 적용

- 계약단가 우선 적용하고 사토처리비용중 운반비의 1.5%적용

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	스마트송장		사토처리단가					처리단가 적용 협의율
			적용율	적용 단가	합계	적재	운반비	사토장 운영비 등	고속도로 통행료
금하지하차도
사토처리2	토사 ℓ=18.540km이상	㎥	1.50%	78	6,200	474	5,259	152	315	82.25%
사토처리9	토사 ℓ=23.600km이상	㎥	1.50%	112	8,255	456	7,532	147	120	82.25%
사토처리10	토사 ℓ=28.200km이상	㎥	1.50%	123	9,369	520	8,238	171	440	84.64%
사토처리10-1	토사 ℓ=28.200km이상	㎥	1.50%	123	11,400	520	8,239	2,201	440	84.64%
사토처리11	토사 ℓ=24.500km이상	㎥	1.50%	107	8,160	520	7,194	171	275	84.64%
사토처리12	토사 ℓ=35.800km이상	㎥	1.50%	166	14,308	520	11,079	2,269	440	84.64%
사토처리1	풍화암 ℓ=42.597km이상	㎥	1.50%	151	11,465	845	10,107	215	298	82.25%
사토처리1	연암 ℓ=42.597km이상	㎥	1.50%	189	14,948	1,666	12,664	320	298	82.25%
박미지하차도
사토처리1	연암, ℓ=42.597km이상	㎥	1.50%	223	17,603	1,962	14,914	376	351	84.64%

❍ 공사비 증․감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
공급가액	-	20,100	20,100
제 잡 비	-	2,010	2,010
총공사비	-	22,110	22,110

검토의견

❍ 우리 본부 시행방침에 따라 투명한 건설행정을 구현하기위하여 본 공사 사토처리에 토사운반 스마트관리시스템을 시행하고자 하는 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 승인하고 향후 설계변경시 정산 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.