투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰

우리본부에서 용역 시행중인 『신림공영차고지(저류조 포함)건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역』에 대해 아래와 같이 준공 기한을 연기 하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신림공영차고지(저류조 포함)건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역

나. 규    모 : 공영 주차장 및 빗물저류조 조성

- 주차장 : 버스101대 (지상, 지하1층), 관리동 및 부속시설

- 저류조 용량 : 35,000㎥ (지하2층)

다. 용역기간 : ‘18.04.02 ~ ’20.08.01(1차 : ‘18. 04.02 ~ ‘18. 12.31)

라. 용 역 비 : 2,048백만원(1차 : 200백만원)

마. 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소외 2개사

바. 준공기한 연기

구 분		공 사 기 간			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
전체	용역기간	‘18.04.02 ~ ‘20.08.01	‘18.04.02 ~ ‘20.08.01	변경사항없음
1차	용역기간	‘18.04.02 ~ ‘18.12.31	‘18.04.02 ~ ‘19.07.01	182일

사. 준공기한 연기사유

- 신림공영차고지(저류조 포함)건설공사 보상 지연에 따른 공사착공 지연으로

건설사업관리기술자 투입이 중지되어 중지된 용역기간을 준공기한에 반영.

아. 귀책소재 : 서울특별시

붙임 : 1. 준공기한 연기검토 보고서. 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서. 1부.

3. 준공기한 연기요청 공문(감리사) 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

	토목부장
주무관	전병철		터널건설과장	박일연		토목부장	12/04 김영수
협조자	경리과장	代김용범
시행	토목부-20437	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2568	/전송	02-3708-2599	/		/	비공개(5)