성북의 미래, 현장에서 답을 찾다
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	석관동 한천마을 정비기반시설공사 설계변경(1회) 시행

석관동 한천마을 정비기반시설 공사에 대하여 다음과 같이 설계변경 시행 하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 석관동 한천마을 주거환경관리사업 정비기반시설 공사

2. 도 급 자 : 을묘종합건설㈜ 임주현

3. 공사기간 : 2018.9.17.~2019.3.16.

4. 변경 사유 : 공사계획 변경에 따른 공사물량 증감 발생

5. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	변경전 금액	변경후 금액	증 감 액
총공사비	680,624,650	1,181,010,070	증 230,385,420
도 급 비	537,960,650	629,585,000	증 91,624,350
관 급 비	412,664,000	551,425,070	증 138,761,070

6. 예산과목

- (시비-본예산)도시재생본부 주거환경개선과, 평생살고싶은 마을만들기 추진, 주거지재생사업추진(도정), 주거환경관리사업(도정), 시설비

- (시비-재생기금)지역 및 도시, 도시재생의 발전기반제고, 도시재생활성화(도시재생기금), 도시재생기반시설조성, 시설비 및 부대비, 시설비

- (구비)도시재생디자인과, 경쟁력있는 명품문화도시건설, 도시디자인추진 체계 및 기반구축, 골목길재생 기본계획 및 시범사업, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액검증확인서 1부.

4. 설계변경 검토보고서 1부.  끝.

주무관	정소현		도시재생1담당	안병석		도시재생디자인과장	임승락		마을재생기획단장	12/04 지덕환
협조자	계약담당	이계웅		재무과장	김영임
시행	도시재생디자인과-10409	(		)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168(삼선동5가)	/	http://www.seongbuk.go.kr/
전화		/전송	02-2241-6556	/		/	대시민공개