문서번호	공원운영과-14149
결재일자	2018.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장	동부공원녹지사업소장
강명환	김태순	오철선	12/04 안수연
협 조

「2018. 보라매공원 인공암벽장 운영 관리용역」

설계변경 검토 보고

2018. 12

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

「2018. 보라매공원 인공암벽장 운영 관리용역」

설계변경 검토 보고

우리 사업소「2018. 보라매공원 인공암벽장 운영 관리용역」과 관련하여 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2018. 보라매공원 인공암벽장 운영 관리용역

○ 용역기간 : 2018. 4. 24. ~ 12. 31.

○ 계약금액 : *********************

○ 도 급 자 : ****************

○ 용역내용

- 암벽등반시민 안내 및 안전수칙 교육

- 암벽등반 무료강습 프로그램 운영

- 암벽시설의 안전점검 및 유지관리(상시)

- 안전사고 대응 체계 구축 등

□ 설계변경사항

(단위 : 천원)

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
렌탈비	▶ 인공암벽장 내 컨테이너 신규 설치(8월)에 따른 사무용 집기 반납으로 렌탈기간 축소	▷ 데스크탑 외 8종 : 9개월 → 5개월	*****
장비비	▶ 인공암벽장 내 설치된 탑링크 마모에 따른 교체 필요	▷ 탑링크 교체 0개 → 4개	*****

※ 탑링크 : 인공암벽장 최상부에 설치하는 장비로 마지막으로 로프가 걸리는 곳

□ 용역비 변경

(단위 : 원)

구 분	소요 금액				비고
	당 초	변경	증 / 감
용 역 비	**********	**********		0
공 급 가 액	**********	**********		0
부 가 가 치 세	비영리법인 제외

‣ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 검토의견

○ 상기 검토보고 내용과 같이 설계변경 시행하여 용역추진에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 변경요청공문 1부.

2. 변경사유서 1부.

3. 변경내역서 1부.   끝.