“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청 (남산1호 터널 앞 버스정류소공사 폐기물처리 용역)

1. 버스정책과-32772호(2018.12.3.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인 「남산1호 터널 앞 버스정류소 설치공사 폐기물처리 용역」에 대해 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 남산1호 터널 앞 버스정류소 설치공사 폐기물처리 용역

나. 준공기한 연기

구 분	계약자	계약금액	준공기한 연기
			당 초	변 경
준공기한 연기	㈜수도권환경 대표 차석구	￦11,070,000	2017.12.11.~ 11.30	2017.12.11.~ 12.30

붙임 1. 준공기한 연기방침서 1부.

2. 준공기한 연기 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	버스정책과장
★주무관	이오수		정류소관리팀장	이상학		버스정책과장	12/04 오희선
협조자	계약2팀장	이태영
시행	버스정책과-32893	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사별관 1동 7층	/
전화	2133-2297	/전송	2133-1049	/	whrornfma@seoul.go.kr	/	부분공개(7)