투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	폐기물 처리용역 설계변경 계약 의뢰(동부1공구, 전체2회)

우리 본부에서 시행중인 『동부간선도로 확장공사(1공구)』에 대해 아래와 같이 설계변경(전체 2회, 1차 2회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구) 건설폐기물 처리용역

나. 도 급 비 : (당초)127,479천원, (변경)87,725천원

다. 용역기간 : ‘17.12.13. ∼ ’18.12.05.

라. 도 급 자 : ㈜순환골재협회

마. 예산과목

- 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별), 동부간선도로 확장(월계1교~녹천교), 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경(2차)                                                      (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증. △감
전체 (2회)	도 급 액	127,479	87,725	감)39,754
	용역기간	‘17.12.13. ~ ‘18.12.05.	‘17.12.13.~ ‘18.12.05.	-

사. 설계변경 사유

- 녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사가 구청 토지보상업무 지연으로 진행이 불가하여 우선적으로 학여울청구아파트 방음벽 설치공사를 시행하고 발생한 폐기물에 대해서 우선 처리

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 변경 내역서(1차 2회) 및 합의각서 등 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	12/04 김영수
협조자	주무관	김동현
시행	토목부-20423	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)