	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도설비부장
(경유)
제 목	변경계약 체결통보(도시철도 9호선 전동차 제작 감독 용역(장기계속) 4차)

1. 도시철도설비부-11113(2018.11.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 계약건에 대하여 붙임과 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 변경계약 체결현황

(단위:원)

구 분	당 초		변 경
	총괄	4차	총괄	4차
계 약 자	케이알이앤씨 주식회사		변경없음
계약금액	723,262,640	139,262,640	변경없음	변경없음
준공기한	2018.06.30.	2018.06.30.	2018.11.30.	2018.11.30.

붙임  변경계약서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	황미령		경리과장	이현숙		총무부장	12/04 정진일
협조자
시행	총무부-8370	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 10층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8746	/전송	02-3708-2459	/	hwangmr@seoul.go.kr	/	부분공개(5)