문서번호	토목부-20393
결재일자	2018.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
권해엽	장종환	12/04 김영수
협 조
	주무관		김동현

설계변경(전체 2회, 1차 2회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) 건설폐기물 처리용역 -

2018. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

설계변경(전체 2회, 1차 2회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) 건설폐기물 처리용역 -

녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사 진행이 토지보상 지연으로 불가한 실정으로 방음벽 설치 중 발생한 폐기물을 우선처리하고자 보고드림.

※ 관련근거 : 도화(감리) 2018-10598호(2018.11.26.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구) 건설폐기물 처리용역

○ 용역규모 : 폐기물 운반 및 처리 474톤

○ 도 급 비

- 전  체 : 폐콘크리트 30,909ton, 폐아스콘 7,225ton

- 1   차 : 폐콘크리트     817ton, 폐아스콘 4,161ton

○ 용역기간

- 전  체 : 2017.12.13. ~ 2020.01.31.

- 1   차 : 2017.12.13. ~ 2018.12.05.

○ 용 역 사 : ㈜순환골재협회

□ 설계변경 및 주요내용

○ 전체분(2회 변경)                                     (금액 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감	비고
전 체 (2회)	도 급 액	952,600	952,600	-
	용역기간	2017.12.13. ~ 2020.01.31.	2017.12.13. ~ 2020.01.31.	-

○ 1차분 (2회 변경)                                    (금액 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감(△)	비고
1차 2회	도 급 액	127,479	87,725	△39,754
	용역기간	2017.12.13. ~ 2018.12.05.	2017.12.13. ~ 2018.12.05.	-

○ 설계변경 사유

- 녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사 진행이 도봉구청 토지보상업무 지연으로 불가한 실정으로 우선적으로 학여울청구아파트 방음벽 설치공사를 시행하고 공사 중 발생한 폐기물에 대하여 우선 처리 필요

○ 주요 설계변경 내용

연번	폐기물 종류	폐기물 수량 (ton)			비고
		당초	변경	증 · 감
1	폐콘크리트	817	3,487	증) 2,670	학여울청구아파트 방음벽 공사 실시로 추가 발생
2	폐아스콘	4,161	23	감) 4,138	녹천마을 ~ 녹천지하차도간 도로개설사업 토지보상업무 지연으로 미실시

○ 공사비 변경 현황(전체 2회)

(금액 : 원)

공 종		수량		금 액 (전체분)		증.감	비 고
		당초	변경	당 초	변 경
폐기물 운반	- 폐콘크리트(㎥)	***	*****	*********	**********	************
	- 폐아스콘(㎥)	*****	**	**********	*******	************
	- 일반관리비(%)	**	**	*********	*********	***********
	- 이 윤(%)	**	**	*********	*********	***********
폐기물 처리	- 폐콘크리트(ton)	***	*****	**********	**********	************
	- 폐아스콘(ton)	*****	**	**********	*******	************
용 역 비	공급가액			***********	**********	************
	부가가치세			**********	*********	************
	도급금액			***********	**********	************

□ 감리단 검토의견

○ 녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사 용지에 대한 보상지연으로 2017년 11월 10일부터 공사가 중단되어, 설계된 수량의 폐기물을 처리하지 못하여, 우선 실시된 학여울 청구아파트 방음벽 설치공사 중 발생된 폐콘크리트, 폐아스콘을 정산 변경함이 타당함

□ 조치의견

○ 감리단 검토 의견이 타당하여 설계변경을 통하여 폐기물 처리물량에 대하여 변경 및 정산하고자 함.

붙임  1. 감리단 검토 의견서 각 1부.

2. 설계변경 내역(전체 2회) 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.