문서번호	급수운영과-30254
결재일자	2018.12.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
이상욱	김남구	김정수		12/05 代김창년
협 조

설계변경 시행계획

(신월5동 29번지 외 6개소 배급수관 정비공사)

2018. 12.

강서수도사업소

급수운영과

설계변경 시행계획

(신월5동 29번지 외 6개소 배급수관 정비공사)

「신월5동 29번지 외 6개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 서울시설공단으로부터 설계변경 검토보고서가 접수되어 이에 따른 설계변경을 시행하고자 함

※ 공사감독2처-19170(2018.11.30.) 설계변경(정산) 검토보고서 제출

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 신월5동 29번지 외 6개소 배급수관 정비공사

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 일 : 2018. 3. 28.

○ 공사기간 : 2018. 4. 2. ~ 2018. 12. 9.

○ 계 약 자 : 하송파인개발(주) 대표 이미자

○ 감 독 자 : 서울시설공단 박민서 감독

□ 설계변경 사유

○ 설계변경 근거

<설계변경 근거>

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제77호)

- 제13장 공사계약 일반조건 제6절(공사설계의 변경)

○ 설계변경 사유

- 공정별 시공물량 증,감 및 신공정 발생

• 물량증감 : 콘크리트 포장절단 외 233종

• 신공정 : 아스팔트포장깨기(굴삭기 0.18㎥,야간) 외 14종

- 신규자재 발생 : 새들(200/50mm) 외 12종

□ 설계변경 내용

○ 설계변경 금액

구 분		금 액		증 ․ 감
		당 초	변 경
도급액	공급가액	***********	***********	*************
	부가가치세	**********	**********	************
	계	***********	***********	*************

○ 주요 물량증감 내역

공 종	규격	단위	당 초	변 경	증 ․ 감
콘크리트포장절단	100~150mm, 지세	m	72	801	증) 729
저소음콘크리트포장절단	T=20㎝,지세	m	1089	361	감) 728
주철(이형관) 부설공	150mm,기계	개소	138	187	증) 49
원형밸브실 설치공	D=100mm	개소	8	4	감) 4
하수도 복구공	PVC100mm	m	61	4	감) 57

□ 조치계획

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 설계변경계약 추진

- 상기 설계변경 건에 대하여 우리사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경계약을 추진코자 함

붙임  1. 공단서류 각 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.  끝.