문서번호	설비부-16796
결재일자	2018.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
성호준		유병기	12/05 권오식
협조

노들섬 특화공간조성 통신공사

설계변경 검토 보고(2차 1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

도시기반시설본부

(설비부)

노들섬 특화공간조성 통신공사

설계변경 검토 보고(2차 1회)

『노들섬 특화공간조성 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 통신공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.9. ~ `19.5.8.

□ 도 급 비 : 873백만원

□ 계 약 자 : ㈜신성글로벌네트워크

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `18.11.30. : 설계변경내역서 제출[유탑노들 제18-294호)

□ 계약변경 현황

○ 계약기간 변경 : 변경없음

구 분	계 약 기 간	비 고
총 차	`17.11.09. ~ `19.05.08.	변경없음
2 차	`18.07.01. ~ `18.12.31.	변경없음

○ 계약금액 : 변경없음

(금액단위 : 원)

구 분	금액	비 고
총 차	873,217,538	변경없음
2 차	246,000,000

- 변경 사유: 현장여건을 고려한 내역 변경

▸ 변경 세부 내용

(금액단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
통합배선설비공사	36,461,849	48,749,874	증)12,288,025
CATV설비공사	9,545,738	14,351,313	증)4,805,575
CABLE TRAY 공사	31,791,683	35,550,163	증)3,758,480
방송설비공사	18,822,408	22,059,596	증)3,237,188
AV설비공사	22,333,582	23,669,022	증)1,335,440
CCTV 설비공사	7,377,266	10,766,743	증)3,389,477
비상벨 설비공사	3,599,946	4,874,036	증)1,274,090
주차관제 설비공사	2,668,638	4,769,151	증)2,100,513
제경비	113,398,890	812,101,02	감)32,188,788
합 계	246,000,000	246,000,000	0

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 현장여건 반영하여 내역 변경함이 타당함

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단 설계변경 요청사항 검토 결과 설계변경 요청내용이 적정한 것으로 판단되어 변경계약(2차)을 시행하고자 함

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.