성북의 미래, 현장에서 답을 찾다
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2018년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가) - 제4회 설계변경

1. 우리구에서 시행중인 「2018년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 제4회 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2018.03.26. ~ 2018.12.31.

다. 도 급 자 : 주식회사 승리씨앤지 대표 이건영

라. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 / 감		비고
총 공 사 비	1,733,464,740	2,069,751,420	증)	336,286,680
도 급 비	1,326,430,000	1,663,380,000	증)	336,950,000
관 급 비	221,745,060	226,321,290	증)	4,576,230
이 전 비	185,289,680	180,050,130	감)	5,239,550

마. 준공기한 변경

○ 당 초 : 2018. 3. 26. ~ 2018. 12. 31.

○ 변 경 : 2018. 3. 26. ~ 2019. 02. 28. (증 59일)

바. 설계변경 사유 : 별첨

사. 예산과목 (세부집행 현황 별첨)

○ 치수과, 하천 및 하수시설 정비, 하수시설 개량확충, 하수시설물 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 하수시설물  : 감) 3,713,300원 - 구비

○  마을민주주의과, 구민중심의 동행정 운영, 효율적인 동행정 운영, 동소규모주민생활 편익사업, 시설비 및 부대비, 시설비

- 동소규모주민생활 편익사업 : 증) 40,000,000원 – 구비

○  물재생계획과, 사업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비(하수시설물 긴급복구 및 정비) - 하수도공기업특별회계

- 긴급복구비 : 증) 300,000,000원 - 시비

붙 임 :  1) 설계변경(제4회) 사유서 1부.

2) 설계변경(제4회) 내역서 1부.

3) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4) 제비율 검증표 1부.

5) 방침서 각 1부.

6) 예산집행 현황 1부.

7) 동소규모 사업현황 1부.  끝.

★주무관							임상철				하수담당					김익기					치수과장					송기민					안전건설교통국장						12/05 하순호
협조자				계약담당							이계웅					자치행정담당							송재진					자치운영추산필								자치운영추산필
재무과장							김영임
시행			치수과-18730										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 10층 치수과 (삼선동5가)																/			http://www.seongbuk.go.kr
전화		02-2241-3634							/전송			02-2241-6563					/														/	대시민공개