문서번호	도시철도토목부-14112
결재일자	2018.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
임경태		방영복	12/05 정대현
협 조
	주무관			안태현

「서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사」 자전거보관대(지붕형) 설치 실정보고에 대한 검토 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

도시철도토목부

「서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사」

자전거보관대(지붕형) 설치 실정보고에 대한 검토 보고

『서울 지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사』와 지붕형 자전거보관대 설치에 대한 실정 보고가 있어 이에 대해 검토 보고 드림. ※ 지감922-18-540호(‘18.12.04)

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사

❍ 위    치 : 올림픽공원역~강동구 둔촌동 산29번지 일원

❍ 규    모 : 총연장 1,470m【본선 1,370m, 정거장 1개소, 환기구 4개소】

❍ 공사기간 : 2010.09.16 ~ 2018.12.31

❍ 도 급 비 : 141,719백만원

❍ 시 공 사 : ㈜대우건설 외 4개사

❍ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 외 2개사

2		보고내용

□ 추진경위

○ ‘18.07.20 : 922공구 건설공사 도로시설물 원상복구 계획 관련 의견 제출(강동구 교통행정과-46610호)

- 동북중고등학교 출입구 앞(우측) 100대 주차 자전거 보관대 설치

○ ‘18.11.08 : 서울지하철 9호선3단계 922공구 지붕형 자전거 보관대 설치요청(강동구 교통행정과-76776호)

- 학생 및 학부모 등이 지붕형 거치대 설치에 대한 지속적인 민원 요청

□ 검토내용

○ 지붕형 자전거 보관대 설치 현황도

구분	위 치 도	현황 사진
현황도

○ 주요 변경 내용(수량 변경)

공종명	단위	변 경 내 용			비 고
		당 초	변 경(안)	증･감
지붕형 자전거 보관대	조	-	10	10	1조당 10대

□ 공사비 증감 현황                                【단위 : 백만원】

구 분	변 경 내 용
	당 초	변 경	증･감
직접비	-	24	24
간접비	-	3	3
합 계	-	27	27

※ 단가적용 : 조달단가 적용

□ 관련규정

입찰안내서

제3장 계약조건(공사계약 일반조건)

Ⅶ 계약금액의 조정

2. 대형공사의 설계변경으로 인한 계약금액 조정

다. 발주기관 외에 해당공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용한 경우

3		책임감리원 검토의견

○ 입찰안내서 『제3장 계약조건(공사계약일반조건) Ⅶ. 계약금액의 조정

2. 대형공사의 설계변경으로 인한 계약금액의 조정. 다. 2)항 “ 발주기관 외에 당해공사와 관련된 인허가기관등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우 ”에 의거하여 유관기관 협의결과에 따른 추가공사비(27백만원)를 반영 설계변경 함이 타당할 것으로 판단됨.

4		조치계획

○ 상기 책임감리원의 검토의견과 같이 지붕형 자전거 보관대 설치에 대한 실정 보고가 적정하다고 판담됨으로 승인코자 하며,

○ 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 1. 책임감리원 검토 의견서 1부.

2. 내역서등 관련문서 1식.   끝.