투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰

우리 부에서 시행 중인 “제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역” 에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토용역

나. 위    치 : 서울시 마포구 난지도길 내 2개 교차로 및 가로 (구룡교차로, 월드컵경기장교차로, 월드컵로)

다. 용역규모 : 사업연장 2,708m (서울시 1,933m, 고양시 775m)

- 구룡사거리 : 평면교차로 개선(좌회전3차로, 직진4차로), 구룡교 확장 폭 6m, 연장 300m

- 월드컵파크3단지 교차로 및 디지털미디어시티입구 교차로 : 신호연동화 운영

- 월드컵경기장 교차로 : 지하차도 신설 폭 4차로, 연장 540m

- 월드컵로 : 월드컵파크 3단지 교차로~월드컵경기장 교차로(양측 2차로 확장)

라. 계 약 자 : ㈜동해종합기술공사

마. 계약변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비 고
****	***********	***********	*	****
****	************* ***************	************* **************	*****	****

바. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 계약자 귀책사유 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 소규모 환경영향평가서 반려에 따른 법령 유권해석 의뢰 및 보완서 작성

- 추진경위

․’18.10.23. : 소규모 환경영향평가서(보완서 포함) 반려 통보 (한강유역환경청→도로계획과)

․’18.10.26. : 소규모 환경영향평가서 반려 통보 (도로계획과→토목부)

․’18.10.29. : 환경부 민원 질의회신 (서울시에서 판단할 사항임)

․’18.11.23. : 토지이용제한 적용여부 검토 요청 (토목부→자원순환과)

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 용역계약서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김종혁		토목설계과장	안규홍		토목부장	12/06 김영수
협조자
시행	토목부-20708	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2591	/전송	02-3708-2599	/	mindle93@seoul.go.kr	/	부분공개(7)