문서번호	교량안전과-21390
결재일자	2018.12.6.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이회진		이홍재	12/06 代박동욱
협조

- 2018년 보라매고가 보수공사 - 실정보고 검토결과 보고

2018. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

- 2018년 보라매고가 보수공사 -

실정보고 검토 결과 보고

『2018년 보라매고가 보수공사』 추진에 따른 실정보고 검토 결과 및

추진계획을 보고 드림

⇒ 교면포장 시공이음부 보수에 따른 신규단가 산출 적정성 검토

Ⅰ		근 거

□ 실정보고(2회)-2018년 보라매고가 보수공사(1종교량 제18-379호, ‘18.11.28)

□ 신정교, 보라매고가 유지관리 방안 보고(교량안전과-19765, ‘18.11.12)

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2018년 보라매고가 보수공사

□ 공사기간 : 2018. 5. 18. ~ 2019. 1. 10

□ 공사내용

○ 교면방수 및 포장 34a, 콘크리트 단면보수 598㎡

○ 콘크리트 균열보수 841m, 콘크리트 표면보수 1,297㎡

○ 강재도장 1,951㎡, 신축이음보수 39m 등

□ 계약상대자 : 세빛에이엔씨㈜ 외 1

□ 감  리  사 : ㈜유신 외 1

Ⅲ		실정보고 검토 내용

□ 교면포장 시공이음부 보수공사에 따른 신규대가 산출 적정성 검토

- 시험시공을 통해 도로봉합재 사용물량 등 단가산출 적정성 검토

- 신규비목 적용단가 적정성 검토

□ 단가산출 적정성 검토

○ 시험시공 개요

- 목    적 : 도로봉합재 사용물량(m당) 조사

- 적용공법 : GUSS 가열식 아스팔트 균열보수

- 시험시공 일시 : 2018.11.22.(야간) / 시공물량 80m

커팅	도막두께 측정	도막폭 측정

○ 시험시공 결과

- 도로봉합재 사용량 : 0.69kg/m당

- 설계단가 : 26,903원/m당 (‘18년 하반기 노임, 기계경비 적용)

	· 단위면적(A) = (80×2)+(12*31) = 532㎟ · 도로봉합재(단위중량 1,300㎏/㎥) 0.000532㎡×1m×1,300㎏/㎥ = 0.69kg ※ 붙임 비중시험 결과 참조
표준 시공단면 (단위 mm)	도로봉합재 산출근거

○ 신규비목 적용단가

- 협의단가 : 설계변경당시 단가에 낙찰율(86.745%) 적용키로 협의

- 적용단가 : 26,903원 × 86.745%=23,336원

Ⅳ		세부 시공계획

□ 도로봉합재 마감포설 실효성 검증

시험시공시 균열부 주입 후 포장면에 마감포설을 실시 하였으나 실효성을

검증하여 과다시공 방지와 적정 시공방법 제시

□ 시공계획

○ 포장면 마감포설과 미포설 두가지 방법으로 시공 후 모니터링 실시

구 분	사공물량	시공방법	비 고
우 안	3,282m	마감포설 실시
좌 안	958m	마감포설 미실시

○ 시공비 검토

- 당 초 : 142,157천원

구 분	연장 (m)	시공단가 (m당/원)	공사비 (천원)	도로봉합재 사용량	비고
포장면 마감포설	4,240	23,336	142,157	0.69kg/m당	제경비포함

- 변 경 : 136,252천원(감 5,905천원)

구 분	연장 (m)	시공단가 (m당/원)	공사비 (천원)	도로봉합재 사용량	비고
합 계	4,240		136,252		제경비포함
포장면 마감포설	3,282	23,336	110,037	0.69kg/m당	우안
포장면 마감 미포설	958	18,157	26,215	0.48kg/m당	좌안

※상기 금액은 시공물량 정산결과에 따라 변동 될 수 있음

○ 위 치 도

Ⅴ		조 치 방 안

□ 상기 검토결과에 따라 작업지시 및 설계변경 추진

□ 모니터링 실시 및 포장이음부 균열보수 시공방법 개선 추진

Ⅵ		향 후 계 획

□ 2018. 12. 07 : 설계변경

□ 2018. 12. 21 : 변경계약 및 준공검사

□ 2018. 12. 31 : 공사 준공

붙 임 : 1. 실정보고(2회)-2018년 보라매고가 보수공사 1부.

2. 비중시험 확인서 1부.

3. 재료시험 성적서 1부. 끝.