문서번호	총무과-34229
결재일자	2018.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
황종욱		김창중	12/06 신종우
협조

2018년 본관 승강기 유지관리 용역 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.12.

행  정  국

(총 무 과)

2018년 본관 승강기 유지관리 용역 설계변경 검토보고

「2018년 본관 승강기 유지관리」용역 중 에스컬레이터 철거로 인한 유지보수 금액 변동에 따른 변경계약을 추진코자 함

□ 용역 개요

❍ 업 체 명 : 신동양엘리베이터(주)

❍ 기    간 : ’1８. 1. 1 ~ ’1８.12.31(1년간)

❍ 계약금액 : *****

❍ 점검대상 : 33대(E/L 21, E/S 10, 장애인리프트 2)

□ 변경 내용

❍ 설계내역 변경

- 계약금액 : *************************

- 에스컬레이터(3,4호기) 철거로 인한 점검대상 승강기 감소(33대 → 31대)로 유지보수 비용 감처리(3개월분)      *에스컬레이터 점검비용 : 178,520원/대·월

❍ 세부 현황                                          (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증감	비고
계	**********	**********	************	천원단위 절사
엘리베이터 및 장애인 리프트	**********	**********	*
에스컬레이터	**********	**********	************

※ 부분준공급 지급(‘18.7.9) : ********

※ ‘붙임’ 설계변경 내역서 참조

□ 향후계획

❍ ‘18.12.   설계변경 의뢰(재무과) 및 용역 준공

붙임 : 1. 설계변경 내역서 일체 1부

2. 합의각서 1부.  끝.