문서번호	시설과-3101
결재일자	2018.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
여은솔	김영균	12/06 진병규
협 조

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역」

설계변경 검토 보고

2018. 12.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역」

설계변경 검토 보고

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역」의 폐기물 물량변동에 따른 설계변경을 검토하고 아래와 같이 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역

○ 용역기간 : 2018. 9. 7. ~ 2018. 12. 8.

○ 계약금액 : 금9,700,000원(금구백칠십만원)

○ 용 역 사 : *******************

○ 용역내용 : 보라매 물놀이터 조성공사 중 발생한 폐기물의 운반 및 처리

□ 설계변경 검토

○ 설계변경 사유

- 공사감독3처-12751(2018.11.26.) : 공사현장 실정보고 승인요청

‣ 블록포장 추가 철거에 따른 폐기물 물량 반영(※실정보고내용 참고)

○ 변동물량 내역

구 분	물 량		비 고
	당 초	변 경
운 반	260.05톤	293.00톤
처 리	260.05톤	293.00톤

□ 예산 검토

○ 용역비 변경내역

구 분	금 액(원)		증/감 (원)	비 고
	당 초	변 경
용역비	9,700,000	10,925,200	증1,225,200
운 반	3,348,182	3,770,000	증421,818
처 리	5,470,000	6,162,000	증692,000
부가세	881,818	993,200	증111,382

○ 예산내역

구 분	예산액	집 행 액				비 고
		품의액 (a)	계약액 (b)	낙찰차액 (c=a-b)	관급자재
물놀이터 조성공사	370,000,000원	296,276,860원	260,933,900원	35,342,960원	66,451,110원

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비(401-01)

□ 검토의견

○ 위와 같이 실정사항에 따른 폐기물 물량을 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

○ 용역비 증액분은 본 공사 낙찰차액을 활용.

□ 향후계획

○ 2018. 12. 06. : 설계변경 의뢰(공원운영과)

○ 2018. 12. 08. : 용역 준공

붙   임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 실정보고내용 1부.  끝.