문서번호	설비부-17088
결재일자	2018.12.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
마동훈		오삼록	12/07 代유병기
협 조

『전태일 노동복합시설 리모델링(전기,통신)』

설계변경 및 공기연장 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.12.

도시기반시설본부

(설비부)

『전태일 노동복합시설 리모델링(전기,통신)』

설계변경 및 공기연장 검토보고

『전태일 노동복합시설 리모델링 개선공사(전기,통신)』와 관련한 건설사업관리자의 설계변경 및 공기연장에 대하여 검토하고 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ DHC-전태L-018100호(2018.12.06.)

- 설계변경 및 공기연장에 대한 검토보고(전기공사)

□ DHC-전태L-018098호(2018.12.06.)

- 설계변경 및 공기연장에 대한 검토보고(통신공사)

Ⅱ		사업개요

□ 공 사 명 : 전태일 노동복합시설 리모델링 개선공사(전기,통신)

□ 공사기간 : ‘18.02.09~’19.01.08.

□ 공 사 비 : 전기488,408천원(도급비309,552천원,,관급비178,493천원,,이전비 363천원)

통신325,046천원(도급비157,264천원, 관급비167,782천원)

□ 감 리 사 : ㈜동해종합기술공사

□ 시 공 사 : ㈜중부전기건설(전기), 대신네트워크(주)(통신)

□ 공사규모

○ 전기 : 수전설비400kW, 태양광9kW, 조명(LED) 및 전열1식

○ 통신 : 통합배선설비, 전관방송설비, CCTV설비, 비상벨설비

□ 공 정 율 : 전기(58%), 통신(60%)

Ⅲ		보고내용

□ 설계변경 및 공기연장

구 분		당초	변경	증감	비고
전기	계약금액	*************	*************	************
	계약기간	********************	********************	****
통신	계약금액	*************	*************	************
	계약기간	********************	********************	****

□ 공종별 변경내용

○ 전기공사

공 종	변경내용	변경사유	증감액 (직접비)	비고
*********	******* *********	*************	*********
*** **	************** *********	*****************	*********
******	******** *********	**********	*********
****	******** *********	************	*********
*** **	******** *********	************	******
****	******* *********	************** ************	*******
****	********* *********	************** ************	**********
******			**********

○ 통신공사

공 종	변경내용	변경사유	증감액 (직접비)	비고
******	******* *********	********* **************** *********** *************** *********	*********
**** **	******************** *********	*********** **************************	*********
**** **	********** *********	*************** *****	*******
******			**********

○ 단가적용

*********************

*********************************************

□ 공사기간 연장

************************************************

□ 건설사업관리기술자 검토의견

○ 시공자 제출된 설계서 변경(누락반영 및 제시사항 변경분) 사항과    전기․통신 공사기간 연장을 검토한 결과 반영함이 타당함.

Ⅳ		보고자 의견

□ 설계변경 및 공기연장에 대한 건설사업관리기술자의 검토내용이 적정하다

판단되므로 총무부에 설계변경 계약의뢰 코자 함.

첨 부 : 1. 건설사업관리단 공문(전기, 통신)각1부.

2. 공종별 변경내역(전기, 통신)각1부.  끝.