투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	설계변경 요청(남촌놀이터 조성공사)

1. 서울특별시 시설관리공단 공사감독3처-13446(2018.12.07.)호와 관련입니다.

2. 남촌놀이터 조성공사에 대하여 공사감독 기관으로부터 변경설계서가 제출되어 아래와 변경요청하오니 처리하여 주기시 바랍니다.

가. 공 사 명 : 남촌놀이터 조성공사

나. 공사기간 : 2017. 12. 13. ~ 2018. 12. 10.

다. 총공사비 : 금497,569,000원(도급비 392,497,000원, 관급비 105,072,000원)

**************************

마. 변경금액 (감7,031,000원)

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		497,569,000	495,098,770	△2,470,230
도급비	공 급 가 액	356,815,455	344,827,273	△11,988,182
	부가가치세	35,681,545	34,482,727	△1,198,818
	합 계	392,497,000	379,310,000	△13,187,000
관급자재비		105,072,000	115,788,770	10,716,770

바. 예산과목 : 공공재생과, 공공재생계획수립, 공공개발및공공공간확충(도시개발), 서울역일대도시재생사업, 시설비및부대비, 시설비(이월예산)

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 설계변경 내용 1부.

3. 변경내역서 및 계약금액조정 검증확인서 각 1부.  끝.

	시설과장
조경팀장	이무림		시설과장	12/07 김재균
협조자
시행	시설과-5698	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 4층(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5966	/전송	02-3783-5969	/		/	부분공개(7)