투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	"천호대로(광나루역) 확장 전기공사" 준공기한 및 관급자재 납기 연기에 따른 변경계약 의뢰

1. 설비부-16993(2018.12.07.)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인“천호대로(광나루역) 확장 전기공사”의 준공기한 및 관급자재       납기 연기에 따른 변경계약을 다음과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 천호대로(광나루역) 확장 전기공사

나. 공사기간: 2011.6.16. ~ 2018.12.20.(7차 2017.9.5. ~ 2018.12.20.)

다. 도 급 자: ************

라. 변경계약 의뢰 내용

1) 전기공사

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	총 차	2011.6.16. ~ 2018.12.20.	2011.6.16. ~ 2019.9.30.	284일 연장
	7 차	2017.9.5. ~ 2018.12.20.	2017.9.5. ~ 2019.9.30.	284일 연장

※ 계약금액 변경 없음

2) 관급자재

계약번호	계약자	품 명	단위	수량	계약금액 [원]	납품기한		비 고
						변경전	변경후
22163247505	주식회사 엘에스티	LED경관조명기구	개	21	11,319,000	‘18.12.23	‘19.9.30	계약금액 변경없음
32163093103	㈜엘이디스퀘어	LED경관조명기구	개	13	4,472,000
00166106605	주식회사 삼보컴퓨터	방송설비	대	1	220,000	‘18.12.31	‘19.9.30
00166107715	주식회사 삼보컴퓨터	방송설비	대	1	690,000
12182114300	㈜삼원씨앤지	자동제어설비	식	1	145,000,000
00175071401	이노뎁(주)	영상감시장치	조	18	7,920,000
00177050101	이노뎁(주)	영상감시장치	식	68	62,924,000
00178217400	이노뎁(주)	영상감시장치	식	72	4,217,400
00168303407	주식회사 케빅	방송설비	식	32	16,958,900

마. 계약변경 사유: 선행공사(토목) 지연에 따른 공기 및 관급자재 납기 연장

바. 귀책소재: 서울시 도시기반시설본부

사. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  1. 설계변경 시행 보고서 1부.

2. 합의각서 총 11부(공사 2부, 관급자재 9부).

3. 건설사업관리단 공문 2부.  끝.

	설비부장
주무관	전성완		환경설비과장	代이호기		설비부장	12/07 代유병기
협조자
시행	설비부-17011	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8618	/전송	02)3708-8659	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	부분공개(5)