문서번호	도시철도설비부-11506
결재일자	2018.12.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		송변전과장		도시철도설비부장
김병훈		서태창		12/07 구자훈
협 조
	신호과장				구봉서
	정보통신과장				추경수

『서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 책임감리용역』

계약금액(총차4회,4차2회) 변경(정산) 보고

2018. 12.

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 책임감리용역』

계약금액(총차4회,4차2회) 변경(정산) 보고

지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 책임감리용역에 대한 물가변동(ESC3,4회) 및 실제 감리원 투입인원에 따른 계약금액을 변경(정산)하여 감리 업무수행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 전면책임감리용역

○ 과업위치 : 송파구 잠실운동장 ~ 올림픽공원 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원 앞)

○ 과업범위 : 9호선 연장건설(3단계) 사업구간 시스템분야 책임감리

- 연  장 9.14km, 정거장 8개소(변전실 3개소)

○ 계약현황 : 세종기술(주) 외 2개사 공동수급(분담이행방식)

구 분	용 역 기 간	계 약 금 액	비 고
****	*********************	***********
****	*********************	***********	준 공
****	**********************	***********	준 공
****	**********************	***********	준 공
****	**********************	***********	진행중

Ⅱ		추 진 경 위

○ 2017. 8.28 : 물가변동(ESC3회)으로 인한 감리비 사전검토 요청(본부→조달청)

○ 2018. 3. 8 : 계약금액[물가변동(ESC1.2회)반영] 변경(총차3회 변경)

○ 2018. 3.16 : 물가변동(ESC3회)으로 인한 감리비 사전검토 재요청(본부→조달청)

○ 2018. 4. 2 : 물가변동(ESC3회)으로 인한 감리비 조정검토의견서 송부(조달청→본부)

○ 2018.10. 8 : 물가변동(ESC4회)으로 인한 감리비 사전검토 요청(본부→조달청)

○ 2018.11.28 : 물가변동(ESC4회)으로 인한 감리비 조정검토의견서 송부(조달청→본부)

Ⅲ		계약변경 내용

○ 변경사유 : 물가변동으로 인한 용역비 조정 및 감리원 투입인력(정산)

○ 변경내용

- 물가변동(ESC3,4회) 반영

- 감리원 투입인력 변경(정산)

- 감리원 투입인력 변경에 따른 물가변동(ESC1~4회) 정산

○ 물가변동(ESC3,4회) 조정 현황

- ESC3회 (2017.1.1.기준) : 첨부 참조

구 분	검토결과	비 고
조정기준일(비교시점)	**********
물가변동 대상 계약금액	***********
물가변동 적용 제외금액	***********
물가변동 적용금액	***********
물가변동 조정율	*****
물가변동 조정 금액	***********
조 정 후 감 리 비	***********

- ESC4회 (2018.01.01.기준) : 첨부 참조

구 분	검토결과	비 고
조정기준일(비교시점)	**********
물가변동 대상 계약금액	***********
물가변동 적용 제외금액	***********
물가변동 적용금액	**********
물가변동 조정율	*****
물가변동 조정 금액	***********
조 정 후 감 리 비	***********

○ 감리원 투입인력 변경(정산) 현황

■ 감리원 투입 변경(정산)

- 감리원 투입일수 : 감10.444인[공휴일 반영-감4일]

ㆍ전기 : 안정적 시운전 및 개통을 위해 전차선감리원 투입연장

ㆍ통신및신호 : 기존배치 감리원으로 업무수행이 가능하여 추가배치 불필요

■총차

구분	등급	당초	변경	증감
전기	계	133.853	136.629	2.776
	특급	49.068	48.804	-0.264
	고급	70.286	69.487	-0.799
	중급	11.885	11.740	-0.145
	초급	2.614	6.598	3.984
통신	계	95.385	88.678	-6.707
	고급	70.854	69.878	-0.976
	중급	24.531	18.800	-5.731
신호	계	82.000	75.487	-6.513
	고급	62.288	61.327	-0.961
	중급	19.712	14.160	-5.552
합계	계	311.238	300.794	-10.444

■1차

구분	등급	당초	변경	증감
전기	계	33.346	36.122	2.776
	특급	14.423	14.159	-0.264
	고급	8.668	7.869	-0.799
	중급	7.641	7.496	-0.145
	초급	2.614	6.598	3.984
통신	계	40.448	33.741	-6.707
	고급	25.396	24.420	-0.976
	중급	15.052	9.321	-5.731
신호	계	40.254	33.741	-6.513
	고급	25.381	24.420	-0.961
	중급	14.873	9.321	-5.552
합계	계	114.048	103.604	-10.444

○ 감리원 투입인력 변경(정산)에 따른 물가변동(ESC1~4회) 정산

- 물가변동(ESC) 정산

구 분		조정비(조달청)	정 산	비 고
ESC	합 계	*********	*********	*********
	1회	********	********	*********
	2회	********	********	*********
	3회	********	********	*********
	4회	********	********	*********

Ⅳ		변경계약 현황

○ 총차

구 분		당 초	변 경	비 고
총 차	용역비	***********	***********	**********
	ESC 3회	*	***********	**********
	ESC 4회	*	***********	**********
총용역비		***********	***********	**********

○ 4차

구 분		당 초	변 경	비 고
4 차	용역비	***********	***********	**********
	ESC 3회	*	***********	**********
	ESC 4회	*	***********	**********
총용역비		***********	***********	**********

Ⅴ		검 토 의 견

○ 서울지하철9호선 3단계 시스템분야 책임감리용역에 대한 물가변동(ESC 3,4회)을 반영하고, 실제 감리원 투입인력 변경에 따라 정산

○ 또한, 감리원 투입인력 변경에 따른 물가변동(ESC1~4회) 조정금액  정산

Ⅵ		향 후 계 획

○ 용역 변경계약(총차4회, 4차2회) 의뢰

○ 용역 준공검사 시행

붙임 : 1. 계약변경(총차4회, 4차2회) 요청문(감리단) 1부.

2. 변경계약 내역서(총차4회, 4차2회) 각1부.

3. 조달청 물가변동 조정검토서(3․4회) 각1부.  끝.