문서번호	공공재생과-11827
결재일자	2018.12.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	서울역재생계획팀장	공공재생과장
김진옥	정병익	12/08 홍선기

- 서계동 복합커뮤니티시설 조성사업 기본계획수립 용역 관련 - 준공기한 연장 검토보고

2018. 12.

도시재생본부

(공공재생과)

- 서계동 복합커뮤니티시설 조성사업 기본계획수립 용역 관련 - 준공기한 연장 검토보고

서울역 일대 도시재생사업의 일환인 ‘서계동 복합커뮤니티시설 조성사업 기본계획수립 용역’ 관련 기관 협의 및 요청사항 보완 등으로 준공기한을 연장하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 사업개요

○ 대지위치 : 서울특별시 용산구 서계동 33-49일대

○ 사업기간 : ’18.04월~’18.12월

○ 사업내용 : 서계동 중심지 통합 마스터플랜 수립

**********************************

****************************

**************************

□ 추진현황

○ ’18. 2. 6. : 용역 시행계획 방침[공공재생과-1278]

○ ’18. 2.14. : 입찰공고 의뢰

○ ’18. 4. 4. : 용역 계약 및 착수

○ ’18.11.15. : 용역 중간보고

Ⅱ		검토내용

□ 준공기한 연장 검토 내용

○ 기간연장

**********************************

******************************************

○ 연장 사유

- 서계동 복합커뮤니티시설 조성사업 관련 사업성 주민 협의 및 요청사항 등에 의해 사업계획 내용의 수정·보완등 기간연장 필요

□ 검토결과 및 처리의견

○ 기간변경

당 초	변 경	비고(증·감)
*********************	********************	************ ********

○ 연기사유 귀책소재  공공재생과

○ 지체상금 부과여부  미부과

○ 처리의견  주민의견수렴 및 계획(안) 변경 등에 따라 해당사항을 반영할 수 있도록 용역기간을 조정·변경 계약처리코자 함.  끝.