문서번호	공간정보담당관-11855
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보기획팀장	공간정보담당관
최지혜		서미연	12/10 최영창
협조

2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업 주간업무(12월2주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보담당관-1154(2018.2.1.)				300,000천원

2018. 12.

공간정보담당관

2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업

주간업무(12월2주) 보고

사업명			2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업
사업기간			‘18.6.12.~‘18.12.31.	담 당		공간정보담당관 최지혜
사업비			300,000천원	업체/PM		삼아항업㈜ 컨소시엄 마성진 차장
보고기간			‘18.12.03.~‘18.12.07.	전체공정율		계획 94.20% / 실시 93.50%
주요내용			1. 항공사진 발전방향 연구 2. 항공사진 서비스 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 제작(`72년 1차 완료) 3. 과거년도 보안처리 DB이관 완료(2009년, 2010년) 4. 과거년도 보안처리 작업 완료(2011년)
업무구분	이 번 주 실 적 (2018.12.3 ~ 2018.12.7.)				다 음 주 계 획 (2018.12.10 ~ 2018.12.14.)
사업관리	1. 항공사진 발전방향 연구 - 실무 배경의 활용방안 조사 - 연구 결과보고서 작성 (1) - 정밀항공사진 통합운영방안 - 추진 방향 별 연구내용 구체화 및 단계화				1. 항공사진 발전방향 연구 - 연구 결과보고서 작성 - 최종보고자료 준비
D B 구 축	작업완료				작업완료
* * * *	********** *************************** ******************* ************************** ******* *********************				************ ************************** ******* ***********************
정확도개선	1. 위치정확도 주점 정보 업데이트 - 1972년 1차, 1981년 2차, 1982년 1차, 1988년 2차, 1989년 1차(작업중)				1. 위치정확도 주점 정보 업데이트 - 1972년 1차, 1981년 2차, 1982년 1차, 1988년 2차, 1989년 1차
S/W 개 발	작업 완료				작업 완료