문서번호	기전설비과-9409
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
안상정		조성태	12/10 유성종
협 조
	기획예산과장			김형규
	재무회계과장			김분숙

『수유6배수지 전기공사』

설계(정산)변경 계획보고 (총차1회,1차1회)

2018. 12

『수유6배수지 전기공사』

설계(정산)변경 계획보고(총차1회,1차1회)

수유6배수지 전기공사건에 대하여 보험료 및 산업안전보건관리비 등의 감액이 발생하여 아래와 같이 설계(정산)변경 코자 함

Ⅰ		사업 개요

❍ 건    명 : 수유6배수지 전기공사

❍ 계약기간 : 총차분 2018. 7. 5.~2020. 5 30.

1차분 2018.7. 5.~2018.12.31

❍ 계약업체 : 지웅전설 대표 한재연

❍ 계약금액 : 총차 금***********원

1차 금**********원

❍ 사업내용(총차)

- 배수지 배관공사

- 배수지 건축전기설비 공사

- 배수지 계측제어설비 공사

❍ 1차 작업지시

- 배수지 접지설비 공사

Ⅱ		설계변경 내용

❍ 각 종 보험료 및 산업안전보건관리비 등 제경비 정산

❍ 계약금액 변경(계약기간 변경 없음)

			(단위: 원)
구 분	당 초	변 경	증・감
총차분	***********	***********	*********
1차분	**********	**********	*********

※ 설계변경내역서 붙임 참조

Ⅲ		조치의견

❍ 상기와 같이 보험료 및 산업안전보건관리비 등에 따른 감액분에 대해 설계변경을 시행코자 함

Ⅳ		행정사항

❍ 설계변경 자체소위원회 개최 및 결과보고

❍ 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

붙임: 1. 설계변경 내역서 각 1부.

2. 설계변경 합의서 각 1부.

3. 건설사업관리단 설계변경 검토의견서 1부.  끝.