문서번호	기반시설과-3455
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
전문관	기반시설과장	시설부장
석대창	라철흠	12/10 전영주

공사 설계 변경 시행 보고(준공)

-2018년 한강 수경시설 유지보수공사(연간단가)-

2018.12.

한강사업본부

(기반시설과)

공사 설계 변경 시행 보고(준공)

[2017년 한강 수경시설 유지보수공사(연간단가)]

『2018년 한강 수경시설 유지보수공사』가 완료된 바, 변경내용을 정산하고자 설계 변경하여 공사 준공에 만전을 기하고자 함

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2018년 한강 수경시설 유지보수공사(연간단가계약)

○ 공사기간 : 2018. 3. 21. ~ 2018.12.31.

○ 도급업체 : ㈜미산조경(유한종)

○ 도 급 액 : 금494,201,000원

□ 설계 변경(준공 정산) 현황

○ 관련 근거

- 실정보고 2차(기반시설과-1777, 2018.6.27.)

- 실정보고 3차(기반시설과-4570, 2018.11.2.)

○ 설계 변경 내용

- 계약 공종별 물량 정산(기 실정보고)

- 신규 내역 발생(기 실정보고)

- 경비 정산(건강·연금보험료, 노인장기, 퇴직공제, 환경보전비 등)

○ 설계 변경                                           (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총 공 사 비		494,201,100	493,647,000	(감)554,100
도급액	공급가액	449,273,728	448,770,000	(감)503,728
	부 가 세	44,927,372	44,877,000	(감)50,372
	도 급 액	494,201,100	493,647,000	(감)554,100

□ 조치 계획

○ 상기와 같은 내용으로 설계변경을 시행하고 공사 준공에 만전을 기하고자 함

붙임 1. 공사 실정보고서(2, 3차) 각1부

2. 2차 설계 변경 내역서 1부

3. 계약금액조정 검증표 1부. 끝.