문서번호	교통운영과-20877
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		BRT팀장	교통운영과장
김재정		代류근호	12/10 강진동
협조	주무관		류근호
	전문관		오상준

2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 기본 및 실시설계

용역 설계 변경(정산) 보고

2018. 12.

도시교통본부

(교통운영과)

2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 기본 및 실시설계

용역 설계 변경(정산) 보고

2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 기본 및 실시설계 용역의 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 기본 및 실시설계

○ 계약기간 : 2018. 4. 2. ~ 2018. 12. 31.

○ 과업규모 : 기본설계 12개소, 실시설계 12개소

○ 계약금액 : ***********

○ 용 역 사 : ***********************

□ 설계변경 내역

○ 교통안전시설 심의, 유관기관(구청, 서울지방경찰청 등) 협의, 민원 발생 등에 따른 설계 지점 및 물량 변경

- 당초 (12개소): 현장조사 12개소, 기본설계 12개소, 실시설계 12개소

- 변경 (17개소): 현장조사 14개소, 기본설계 13개소, 실시설계 10개소

○ 현장조사 지점 수가 증가함에 따라 총용역비 증가

구 분	금 액		증감	비고
	당초	변경
직접인건비	************	************	**********
직접경비	************	************	**********
제경비	************	************	***********
기술료	***********	**********	*********
소 계	***********	***********	*******
손해배상보험액	*********	*********	*
부가가치세	***********	***********	******
총용역비	***********	***********	*******

○ 과업대상 변경 내역

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 검토의견

○ 과업지점이 당초 12개소에서 17개소로 증가하였기에 위와 같이 설계 변경하고자 함.

□ 행정사항

○ 위와 같이 설계 변경하여 정산 처리하고자 함.

- 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계 변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.