문서번호	설비부-17131
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
김현욱	유병기	12/10 代유병기

『남부도로사업소 청사 신축 전기·통신공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(제1회) 검토 보고

2018. 12.

도시기반시설본부

[ 설 비 부 ]

『남부도로사업소 청사 신축 전기·통신공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(제1회) 검토 보고

「남부도로사업소 청사 신축 전기·통신공사」의 물가변동(ESC)에 따른 계약금액 조정(제1회)에 대해 아래와 같이 검토 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

㈜삼우공간 제2018-574호(2018.12.06.), 물가변동으로 인한 계약금액       조정보고서 검토 보고(전기,통신공사)

Ⅱ		공사개요

<전기공사>

공 사 명 :『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

공사위치 : 서울시 금천구 시흥3동 963-1 외 13필지

공사기간 : (총차) 2017. 11. 09. ~ 2019. 05. 08.

(1차) 2017. 11. 09. ~ 2018. 12. 31.

공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적 5,361㎡)

공사내용 : 수전용량 500KVA(업무시설 300KVA, 주민편의시설 200KVA),                  태양광발전장치 50KW, 비상발전기 200KW 설치 등

도 급 비 : (총차) 1,029백만원, (1차) 41백만원

<통신공사>

공 사 명 :『남부도로사업소 청사 신축 통신공사』

공사위치 : 서울특별시 금천구 시흥3동 963-1 외 13필지

공사기간 : (총차) 2017. 11. 03. ~ 2019. 07. 31.

(1차) 2017. 11. 03. ~ 2018. 12. 31.

공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적 5,361㎡)

공사내용 : 옥외통신공사 1식, 통합배선공사 1식 CCTV 설치공사 1식 등

도 급 비 : (총차) 493백만원, (1차) 4백만원

Ⅲ		검토내용

<전기공사>

계약금액(ESC) 조정 조건

구분 횟수	제 1 회	비 고 (충족조건)
조 정 방 법	지 수 조 정	적 합 (계약서 확인)
기 준 시 점	2017.10.31.	적 합 (90일 이상)
비 교 시 점	2018.09.01.
경 과 기 간	305일 경과
조 정 률	6.9%	적 합 (3% 이상)

계약금액(ESC) 조정(제1회) 내용

물가변동 조정률 [A]	6.9%	물가변동 경과기간	305일	기준시점(직전조정일) : 2017.10.31.
				비교시점(조정기준일) : 2018.09.01.
물가변동 대상공사의 계약금액 [B]		1,028,152,705원		물가변동 조정기준일 현재의 공정률	예정공정률	2.341%
					실행공정률	2.342%
물가변동 적용제외 계약금액 [C]		24,080,000원		물가변동 적용대가 [D] = [B - C]	1,004,072,705원
선금급 공제금액 [F]		해당 없음		물가변동 등락대상 조정금액 [G] = [A × D]	69,281,000원
경유세 공제금액 [H]		해당 없음		물가변동 조정 적용금액 [I] = [G – F - H]	69,281,000원

감리단 검토의견

□ 상기와 같이「남부도로사업소 청사 신축 전기공사」와 관련하여 검토한 결과 입찰일로부터 물가변동 경과기간(305일), 지수조정률(6.9%)등이 적정하게 산출되어 물가변동으로 인한 계약금액 설계변경이 타당한 것으로 사료됨.

<통신공사>

계약금액(ESC) 조정 조건

구분 횟수	제 1 회	비 고 (충족조건)
조 정 방 법	지 수 조 정	적 합 (계약서 확인)
기 준 시 점	2017.10.24.	적 합 (90일 이상)
비 교 시 점	2018.08.31.
경 과 기 간	311일 경과
조 정 률	3.06%	적 합 (3% 이상)

계약금액(ESC) 조정(제1회) 내용

물가변동 조정률 [A]	3.06%	물가변동 경과기간	311일	기준시점(직전조정일) : 2017.10.24.
				비교시점(조정기준일) : 2018.08.31.
물가변동 대상공사의 계약금액 [B]		492,710,120원		물가변동 조정기준일 현재의 공정률	예정공정률	0.22%
					실행공정률	0.22%
물가변동 적용제외 계약금액 [C]		1,084,000원		물가변동 적용대가 [D] = [B - C]	491,626,120원
선금급 공제금액 [F]		해당 없음		물가변동 등락대상 조정금액 [G] = [A × D]	15,043,000원
경유세 공제금액 [H]		해당 없음		물가변동 조정 적용금액 [I] = [G – F - H]	15,043,000원

감리단 검토의견

□ 상기와 같이「남부도로사업소 청사 신축 통신공사」와 관련하여 검토한 결과 입찰일로부터 물가변동 경과기간(311일), 지수조정률(3.06%)등이 적정하게 산출되어 물가변동으로 인한 계약금액 설계변경이 타당한 것으로 사료됨.

Ⅳ		조치의견

책임건설사업관리기술자가 검토한 전기 및 통신공사의 물가변동으로 인한 계약금액(ESC) 조정(제1회) 건에 대하여 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 승인 통보하고자 하며 향후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임  검토 보고서(감리단) 1부.  끝.