문서번호	통계데이터담당관-13020
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		빅데이터개방팀장	통계데이터담당관
류상언		박은주	12/10 안정준
협조

	- 2018년 열린데이터광장 운영 및 유지관리 용역 - 월간업무보고(11월)

통계데이터담당관

- 2018년 열린데이터광장 운영 및 유지관리 용역 -

월간업무보고(11월)

○ 사 업 명 : 2018년 열린데이터광장 운영 및 유지관리 용역

○ 사업기간 : ’18.1.1 ~ ’18.12.31

○ 계약업체 : ㈜윤커뮤니케이션즈

○ 계약금액 : 금390,000,000원

□ 주요추진실적(11.1 ~ 11.30)

○ 열린데이터광장 운영 및 공공데이터 개방 실적(별첨#1, #2, #3)

구 분	주요 추진실적(11월)	주요 추진계획(12월)
정기업무	□ 시스템 모니터링 및 점검 조치 (90.4%) o JBoss/Talend/Scouter/LOD/Octagon/ 인터랙티브서울/지하철공공데이터 □ 기타 (90.4%) o 운영현황/웹운영현황 작성 o QnA요청처리 (23건) o 활용갤러리 (10건) o LiveRe 댓글에 댓댓글 작성(20건)	□ 시스템 모니터링 및 점검 조치 (100%) o JBoss/Talend/Scouter/LOD/Octagon/ 인터랙티브서울/지하철공공데이터 □ 기타 (100%) o 운영현황/웹운영현황 작성 o QnA요청처리 o 활용갤러리 o LiveRe 댓글에 댓댓글 작성
	□ Data개방 승인건수(총 35건) (90.4%) o 한양도성 순성안내 교통정보 외 77건 □ Data개방 취소건수(총 0건) (90.4%)	□ Data개방 (100%) o 서울시 공공데이터 전면 확대 개방 관련 개방작업
비정기업무	□ 열린데이터광장 운영 관리 (90.4%) o 프로그램 수정 및 개선 - 희망서울 생활지표 콘텐츠 88종 통합 작업관련 퍼블리싱작업과 소스개발작업 - TOPIS 서버 이전관련 준비 작업 - 데이터셋 상세화면 출력여부 체크로직 수정 - 서울시 홈페이지 통합 오픈에 따른 GNB 수정 - 서울시 통합로그인 전체 운영 오픈 - 공공데이터 제공 책임관 및 실무담당자 안내 추가 - 프론트오피스 WEB/WAS서버 장비교체 관련 서버 작업 - 통계서비스관련 OPENAPI서비스 최신 데이터로 적재작업(140/1050) - 생활인구 페이지 내려받기 디자인 변경 - 자치구 리스트화면 로그인/로그아웃 버튼오류수정 o 통계청 KOSIS 연계자료 현행화 - 도시정책 지표조사 관련 데이터 전송하기 검토작업 o 데이터 데이터 개방 작업 및 현행화 - API-to-API 연계 관련 개방작업관련 개발 - 건축주택데이터웨어하우스 연계 서비스 개방하기 - 자치구단위 서울 생활인구 서비스 개방하기 - 에코마일리지 에너지 사용량 관련 sheet/openapi 서비스 개방하기 - 저공해자동차관리시스템 서비스 개방하기 - 서울형주거복지통합시스템 연계 서비스 개방하기 - 서울시립교향악단홈페이지 연계 서비스 개방하기 - 서울미래유산 연계 서비스 개방하기 - 서울시보육포탈서비스 연계 서비스 개방하기	□ 열린데이터광장 운영 관리 (100%) o 프로그램 수정 및 개선 - 웹접근성 실태조사 결과 관련하여 작업 - 희망서울 생활지표 콘텐츠 88종 통합 작업 관련하여 서비스오픈 - TOPIS 서버 이전작업 수행 - 프론트오피스 WEB/WAS서버 장비교체 관련 서버 작업 - 통계서비스관련 OPENAPI서비스 최신 데이터로 적재작업 o 통계청 KOSIS 연계자료 현행화 - 도시정책지표관련 데이터 수정 후 재전송 처리 - 주민등록인구 전송 관련 데이터 수집 o 데이터개방 작업 및 현행화 - API-to-API 연계 관련 개방작업관련 개발 - 실내공간정보시스템 연계하여 데이터 개방 - 지도태깅 연계하여 데이터 개방 - 도로관리시스템 연계하여 데이터 개방

○ 운영시스템 자원 정기점검 실적(별첨#4)

구 분	CPU	메모리	DISK
WEB/WAS 서버	특이사항 없음	특이사항 없음	로그 파일 정리
DB서버	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음

○ 상용S/W 점검(별첨#4)

구 분	내용
WebtoB	특이사항 없음
Jeus	특이사항 없음
Octagon BI	특이사항 없음
지하철 공공데이터개방 플랫폼	특이사항 없음, TOPIS시스템 서버이전 관련 지원 작업
웹크롤링	특이사항 없음
LOD	특이사항 없음
인터랙티브 서울	특이사항 없음, 재정시계 단위 관련 영문 설명을 TN으로 변경

○ 오픈S/W 점검(별첨#4)

구 분	내용
JBoss	특이사항 없음
ETL	특이사항 없음
Daisy	특이사항 없음
Scouter	특이사항 없음

○ 투입인력 (별첨#5)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누적
계획	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	33
실적	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	33

○ 방문자 통계 (별첨#6)

UV(user view)		PV(page view)
구분	방문(수)자	구분	방문(수)자
사용자수	42,929	페이지뷰	539,852
신규사용자	38,280	신규사용자	232,107
재사용자	12,942	재사용자	307,745

□ 향후계획 : 위 내용에 의거 기성준공검사(수) 실시(12.11)

전회까지 지급금액	금회 지급금액	누계	잔금
************	***********	************	***********