문서번호	운영과-9050
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
류의창		최영효	12/10 代이희신
협 조

(유해)화학물질관리법 장외영향평가 인허가

전문 용역시행 준공기한 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

중랑물재생센터

(운영과)

「(유해)화학물질관리법 장외영향평가 인허가 전문 용역시행」

준공기한 변경 보고

우리센터에서 추진중인 「(유해)화학물질관리법 장외영향평가 인허가 전문 용역시행」에 대하여 준공기한 변경에 따른 검토 보고임.

Ⅰ		용역개요

❍ 용역명: (유해)화학물질관리법 장외영향평가 인허가 전문 용역시행

❍ 용역기간: 2018. 6. 14.~2018. 12. 31

❍ 계약금액: 18,175,300(금일천팔백일십칠만오천삼백원)

❍ 계약자: 우리안전엔지니어링 주식회사 대표 김용길

❍ 용역내용: 장외영향평가서, 설치검사, 영업허가 취득 업무

Ⅱ		용역실시 내역

❍ 2018. 9. 12. 「장외영향평가서 제출」

❍ 2018. 11. 6. 「최초 설치검사 신청서 제출」

❍ 2018. 11. 26. 「영업허가 신청서 제출」

Ⅲ		보고자 의견

❍ 화학물질관리법 영업허가를 득하기 위하여 용역시행사에서 장외 영향평가서 등 인허가 도서를 관련기관에 제출하였으나, 검토 및 승인이 지체되어 용역기한내 영업허가를 득할 수 없는 실정임.

❍ 용역이 완료될 때 까지 준공기한을 변경하여 용역시행사에서 계약의무를 성실히 이행하고, 2019년 5월 21일 이내에 중랑물재생센터 영업허가를 취득하는데 만전을 기하는 것이 타당함.

Ⅳ		검토결과

❍ 준공기한 변경 시행

- 당초: 2018. 12. 31.

- 변경: 2019. 6. 28.

❍ 계약금액은 변경없음

붙임  장외영향평가 용역 준공기한 변경 요청서 1부.  끝.