문서번호	도로보수과-11306
결재일자	2018.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		유태용	12/11 김용제
협조
	주무관		이옥휘

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제12차 작업지시 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

강서도로사업소

(도로보수과)

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제12차 작업지시 계획 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2018. 3. 8. ~ 2018. 12. 31.

○ 시공업체 : (주)세흥실업 대표 김덕자

○ 도 급 비 : 723,101,000원

□ 작업지시 내역

○ 2018년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) (재)도색

- 위   치 : 강서구 방화동 503-9~10외 26개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 (재)도색  L=31,786m

□ 조치계획

○ ‘18년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 포장구간에 대해 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 노면표시 (재)도색 작업을 지시하여 시공하고 추후 정산처리코자 함.

- 건    명 : ‘18년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제12차)

- 작업위치 : 강서구 방화동 503-9~10외 26개소

- 작업기간 : 2018. 12. 12. ~ 2018. 12. 21.

- 개략금액 : 61,640천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 공종 및 물량 : 31,786m

(도색 : 14,563m, 재도색 : 2,660m, 차로밑그림 : 14,563m)

▣ ‘18년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 예산 증액 보고

□ 예산 증액사항 보고

1. 관련근거

- ‘18년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 예산집행 및 추진계획 보고

【도로보수과-1154호(’18.2.6.)】

- ‘18년 관내 포장도로 굴착복구 지역 사후정비 추진계획

【도로보수과-2254호(’18.3.13.)】

2. 현황 및 문제점

- 추진계획 보고시 ‘18년 포장도로 굴착복구(연간단가) 및 사후정비 공사의 차선 도색은    업무 효율성 및 작업의 신속·정확성을 위해 ’18년 교통안전시설(노면표시) 유지보수    공사에 포함하여 통합 발주하였으나,

- 당초 계획보다 노면 도색 물량이 증가하여 예산이 부족한 실정임.

- 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	배정금액	사 업 비				부족금액
		계	도급비	관급비	이전비
계	100,000	114,763	84,067	30,696	0	14,763
‘18년 포장도로 굴착복구공사	70,000	114,763	84,067	30,696	0	14,763
‘18년 포장도로 사후정비공사	30,000

3. 대책(조치의견)

- 부족한 예산 14,763천원을 ‘도로굴착복구기금’ 예산의 범위내에서 사용하고, 추후    설계변경시 정산·반영하고자 함.

붙임  1. 작업지시서(수량산출포함) 및 개략공사비 1부.

2. 방침서 각 1부.

3. 총괄내역서(굴착,사후포장) 1부.  끝.