문서번호	토목부-20869
결재일자	2018.12.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		명경출	12/11 김영수
협조
	주무관		박운용

설계변경(전체31회, 14차3회) 검토보고

[강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사]

2018. 12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계변경(전체31회,14차3회) 검토보고

[강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사]

본 공사 건설사업관리단으로부터 실정보고를 반영한 시설공사 설계변경(전체31회, 14차3회)요청이 있어 검토보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사

○ 규    모 : 도로개설 폭 4~8차로, 연장 2.48km

○ 계약금액 : 198,362백만원(14차 20,150백만원)

○ 공사기간 : `01.12.29~`19.11.30 (14차 `18. 1. 5.~ 12. 31.)

○ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설/(주)서영엔지니링

□ 설계변경 내용

가. 설계변경(전체 31회, 증 8백만 원) 사항

○ 개통구간 환경정비비 반영 : 증) 18백만원

- 토목부-17438(`18.10.12) 실정보고 승인

○ 금하지하차도 사토장 변경 : 감) 35백만원

- 토목부-17708(`18.10.17) 실정보고 승인

○ 작업시간 단축에 따른 임금보전 : 증) 3백만원

- 기술심사담당관-12107(`18.8.7)

○ 토시운반스마트관리시스템 운영비 반영 : 증) 22백만원

- 토목부-20412(`18.12.4) 실정보고 승인

나. 계약변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
공사 기간	전체(31회)	2001.12.29~2019.11.30	2001.12.29~2019.11.30	-	변동없음
	금회(14차3회)	2018.01.05~2018.12.31	2018.01.05~2018.12.31	-	변동없음
도급액	전체(31회)	198,362,000,000	198,370,000,000	8,000,000	증
	금회(14차3회)	20,150,000,000	20,286,740,000	136,740,000	증

다. 주요 변경사항

1) 전체31회

공 종	당 초	변 경	증·감 (단위: 천원)
개통구간 환경정비비 반영	-	- 소하동 도시계획도로 : 노견측 청소, 갓길제초작업 1식 (작업인원 8명 x 6일, 신호수포함) - 소하JCT 교량구간 : 집수구 청소, 노견측 청소 1식 (작업인원 3명 x 3일, 신호수포함) - 폐기물(폐합성수지)처리비 1식	증 18,100
금하지하차도 사토장변경 (송도11-2공구)	- 운반거리 : 42.597 Km - 수 량 : 34,590 m3	- 운반거리 : 28.200 Km - 수 량 : 34,590 m3	감 34,500
작업시간 단축에 따른 임금보전		-폭염에의한 작업시간단축 임금보전 : 1 식	증 3,069
토사운반 스마트관리시스템 운영비 반영		- 사토운반 관리시스템 운영비: 1 식	증 22,100

2) 14차3회

공 종			당 초	변 경
토목공사	토 공 사		사토운반(54,774m3)	사토운반(58,943m3)
	도로 및 포장공	방음벽	방음터널(U-Ttpe구간), 방음벽변경	방음터널(U-Ttpe구간), 방음벽변경
	지하차도공	토공	터파기(42,095m3),토사상차(24,464m3)	터파기(31,121m3), 토사상차(60,000m3)
		가시설공	가시설강재(1,251ton)	가시설강재(1,849ton)
		구조물공	레미콘(13,777m3),철근(891ton)	레미콘(8,174m3),철근(843ton)
		배수및방수공	도막쉬트방수(11,024m2)	도막쉬트방수(11,402m2)
		비개착터널	STS압입(수평4공, 수직14공)	STS압입(수평4공, 수직14공)

라. 공사비 증·감 현황

- 전체31회

(단위 : 원)

공 종	수량	단위	당 초	변 경	증·감
Ⅰ. 공 통 공 사	1	식	7,753,148,327	7,758,847,485	증 5,699,158
Ⅱ. 토 목 공 종	1	식	123,829,744,009	123,932,738,009	증 102,994,000
Ⅱ-1. 남북간 연결도로	1	식	3,940,095,502	3,845,319,034	감 94,776,468
Ⅱ-2. 한신아파트 보도육교 개선공사	1	식	423,194,345	423,194,345	-
Ⅲ. 기아대교 철거 및 신설공사	1	식	6,306,106,563	6,306,106,563	-
가. 직 접 공 사 비	1	식	142,252,288,746	142,266,205,436	증 13,916,690
1) 간 접 노 무 비	1	식	7,174,135,000	7,179,948,000	증 5,813,000
2) 산 재 보 험 료	1	식	1,946,329,000	1,947,890,000	증 1,561,000
3) 고 용 보 험 료	1	식	657,505,000	658,042,000	증 537,000
4) 건 강 보 험 료	1	식	119,804,000	118,726,000	감 1,078,000
5) 노인장기요양보험료	1	식	7,812,000	7,743,000	감 69,000
6) 연금보험료	1	식	167,582,000	166,002,000	감 1,580,000
7) 퇴직공제부금비	1	식	236,075,000	234,881,000	감 1,194,000
8) 산업안전보건관리비	1	식	2,276,917,000	2,277,192,000	증 275,000
9) 기 타 경 비	1	식	5,505,836,000	5,506,717,000	증 881,000
10) 공사이행보증수수료	1	식	1,383,357,000	1,383,367,000	증 10,000
11) 건설하도급대금지급보증발급수수료	1	식	48,269,000	48,001,000	감 268,000
나. 간 접 공 사 비	1	식	19,523,621,000	19,528,509,000	증 4,888,000
12) 일 반 관 리 비	1	식	2,193,686,000	2,193,898,000	증 212,000
13) 이 윤	1	식	1,030,351,715	1,030,391,752	증 40,037
14) 도로점용교통처리용역	1	식	268,709,750	268,709,750	-
15) 안 전 점 검 비	1	식	554,887,548	554,887,548	-
16) 환경영향조사비	1	식	500,000,000	500,000,000	-
17) 교통안전시설물 실시설계용역	1	식	63,499,000	63,499,000	-
18) 교통안전시설물 감리용역	1	식	15,546,400	15,546,400	-
19) 석면조사용역	1	식	48,415,000	48,415,000	-
20) 석면폐기물처리비	1	식	109,300,000	109,300,000	-
21) 지장전주이설(이전비포함)	1	식	42,409,923	42,409,923	-
22) 임목폐기물처리	1	식	17,529,620	26,604,620	증 9,075,000
23) 건물조사비	1	식	73,700,000	73,700,000	-
24) 수도원인자부담금-퇴수	1	식	10,955,230	10,955,230	-
25) 사면안정검토비	1	식	20,892,439	20,892,439	-
26) 공사손해보험료	1	식	1,999,974,100	1,999,974,100	-
27) 건설기계대여금지급보증수수료	1	식	68,580,000	65,431,000	감 3,149,000
28) 오수처리시설 폐쇄	1	식	3,200,170	3,200,170	-
29) 기아천교주변 시설물변경	1	식	36,800,000	36,800,000	-
30) 교통영향평가,교통처리계획,모니터링	1	식	134,600,000	134,600,000	-
31) 방음터널소음해석및설계용역비	1	식	73,000,000	73,000,000	-
32) 공사중 교통관리	1	식	26,300,000	26,300,000	-
33) 발파암 매각	1	식	-15,310,500	-15,310,500	-
34) 신호등이설 실시설계용역외	1	식	12,851,042	12,851,042	-
35) 작업시간 단축에 따른 임금보전	1	식	-	2,790,000	증 2,790,000
36) 스마트관리시스템운영비	1	식	-	20,100,000	증 20,100,000
37) 물 가 변 동	1	식	11,263,303,726	11,222,703,726	감 40,600,000
다. 공 급 가 액	1	식	180,329,090,909	180,336,363,636	증 7,272,727
라. 부가가치세	1	식	18,032,909,091	18,033,636,364	증 727,273
도 급 비			198,362,000,000	198,370,000,000	증 8,000,000

-14차3회

(단위: 천원)

공 종	단수	단위	당 초	변 경	증·감	비고
공통공사	1	식	492,853	498,813	증 5,965
토목공사	1	식	13,138,082	13,537,983	증 399,900
남북간연결도로	1	식	1,097,,439	1,050,177	감 47,263
직 접 공 사 비	1	식	14,728,375	15,086,978	증 358,603
제 잡 비	1	식	2,655,807	2,432,013	감 223,794
물 가 변 동	1	식	934,000	923,500	감 10,500
공 급 가 액	1	식	18,318,182	18,442,491	증 124,309
부가가치세	1	식	1,831,818	1,844,249	증 12,431
도 급 비			20,150,000	20,286,740	증 136,740

마. 감리단 검토의견

○ 본 공사의 전체(31회) 및 14차(3회) 설계변경에 대한 적정성 검토결과 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치계획

○ 건설사업관리단 검토의견과 같이 설계변경 내용이 적정하므로 계약상대자와 변경계약 체결코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.