문서번호	기전설비과-9459
결재일자	2018.12.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	12/11 유성종
협 조
	기획예산과장			김형규
	재무회계과장			김분숙
	시설과장			송병욱

- 우면산가압장 급수체계 개선 -

양재가압장 천장크레인 납품기한 연장 계획

2018. 12.

상수도사업본부

【생산부】

- 우면산가압장 급수체계 개선 -

양재가압장 천장크레인 납품기한 연장 계획

우리 본부에서 추진중인「우면산가압장 급수체계 개선」사업의 천장크레인 납품기한을 선행공정 일정변경에 따라 연장하고자 함

□ 사업현황

◯ 사 업 명 : 양재가압장 천장크레인 제작구매설치

◯ 계 약 자 : ㈜주원엔텍 (대표 : 송주원)

◯ 계약금액 : 금35,426,030원

◯ 계약기간 : 2018.07.05.~2018.12.20.

□ 변경내용 및 사유

◯ 선행공정 지연에 따른 납품기한 변경

- 양재가압장 구조물 공사의 일정변경에 따라 상부 슬라브에 설치 예정인              천장크레인 설치를 연기함

◯ 계약금액 : 변경없음

◯ 계약기간 : 증192일 연장

• 당초 : 2018.07.05.~2018.12.20.

• 변경 : 2018.07.05.~2019.06.30.

□ 행정사항

◯ 재무회계과에 관련사항 통보, 계약사항 변경

◯ 해당 사업 사고이월 시행

붙임 1. 책임건설사업관리단 일정변경 공문 1부.

2. 계약자 합의서                    1부.  끝.