투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행(준공) - 목동교 외 1개소 보수공사

1. 2018년도 예산사업으로 추진한 “목동교 외 1개소 보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 목동교 외 1개소 보수공사

나. 공사개요 : 난간설치 및 연석보수 230m, 교면방수 1,560㎡ 등

다. 공사기간 : 2018.5.3 ~ 2018.12.14

라. 계약금액 : 금405,280,700(금사억오백이십팔만칠백원정)

마. 계 약 자 : 케이디에프에스㈜  대표 황욱정

바. 변경사유 : 신규공종 발생 및 실제 시공물량(증․감)에 따른 계약금액 조정

사. 예산과목 :

1) 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 목동교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

2) 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 오목교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

아. 설계변경 내역                                                  (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증・감
총 공 사 비		624,124,700	605,655,300	감) 18,469,400
도급비	공 급 가 액	368,437,000	394,836,000	증) 26,399,000
	부가 가치세	36,843,700	39,483,600	증) 2,639,900
	계	405,280,700	434,319,600	증) 29,038,900
관 급 비		178,194,000	170,016,700	감) 8,177,300
이 전 비		40,650,000	1,319,000	감) 39,331,000

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 보고서(정산) 1부.

3. 설계변경서 공문 및 내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 합의각서 1부.

6. 계약금액검증확인서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	강연홍		시설보수과장	12/11 박병연
협조자
시행	시설보수과-9538	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7971	/전송	2657-7970	/		/	부분공개(6)