투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시간의 정원 경관조명등 구매 및 교체 설치계획 변경 시행

1. 여의도공원관리사무소-2432호(2018.10.1.)와 관련입니다.

2. 선유도공원  시간의정원 경관 조명등 구매 및 교체 설치계획에 따른 자재추가 발생      에 대해 아래와 같이 병경하여 시행하고자 합니다.

가. 작 업 명 : 시간의 정원 경관조명등 구매 및 교체 설치시행

나. 작업기간 : 2018. 10. 1. ~ 12. 20.

다. 총작업비 : 금21,331,500원

라. 작업내용 : 금21,331,500원(금이천일백삼십삼만일천오백원)

- 경관등 구매 : ********************************

****************************

***********************************

- 교체 작업비 : ******************************

※기 배정된 일상경비로 집행

마. 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총 작업비	21,331,500	22,299,500	968,000

바. 시행업체 : ****************************

**************************

사. 변경사유 : 현장여건에 따른 물량 변경

아. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 여의도공원관리사무소, 세계적인 환경.생태 테마

공원 육성, 산하공원 운영, 선유도공원 유지관리, 일반운영비, 공공운

운영비 : 5,962천원

붙임 : 1. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부. 끝.

주무관	박시현		소장	代박시현		여의도공원관리사무소장	12/11 나옥임
협조자
시행	여의도공원관리사무소-3186	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 선유로 343 (당산동)선유도공원관리사무소	/
전화	02)2631-9367	/전송	02-786-2599	/	sipark7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)