문서번호	생태공원과-2437
결재일자	2018.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
장창수		최병언	12/11 代김호규
협조
	주무관		이나영

- 여의도 샛강 분류부 생태거점 조성사업 -

예비준공검사 시행계획

2018. 12

생태공원과

- 여의도 샛강 분류부 생태거점 조성사업 -

예비준공검사 시행계획

한강의 자연성을 회복하기 위하여 시행중인 “여의도 샛강 분류부 생태거점 조성사업”의 준공기한(1차 공사)이 도래함에 따라 예비준공검사를 시행하여 업무추진에 만전을 기하고자 함.

□ 시행근거

○ 건설공사 예비준공검사 방법 개선

- 기술심사담당관 제10083호(2018.6.28.)

※ 시행대상 : 감독권한대행 등 건설사업관리 시행 공사

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 여의도 샛강 분류부 생태거점 조성사업

○ 위    치 : 여의도 샛강 분류부(상류) 주변

○ 공사내용 : 수변식생 개선, 수변데크 조성, 이용편의시설(파크골프장, 화장실 등) 개선, 수목식재 등

- 1차 공사 주요내용

□ 파크골프장 정비(9홀 → 14홀)

□ 소생물 서식처 조성 : 물총새 서식처 10개소, 횟대(15개) 1개소

□ 수목식재 : 교목(느티나무 등 11종) 629주, 관목(갯버들 등 5종) 49,600주

○ 공사기간 : 2017. 12. 28 ~ 2019. 12. 31

┏ 1차 공사 : 2017. 12. 28 ~ 2018. 12. 31

┗ 2차 공사 : 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 30

○ 계약금액 : 금2,569,834,000원(관급자재 금1,096,937,000원 별도)

○ 계 약 자 : 주계약자 공동도급

┏ 주계약자(조경) : 이화종합건설㈜ 대표 우경식

┗ 부계약자(토목) : 성우건설㈜ 대표 이형호

□ 예비준공검사 개요

○ 일    시 : 2018. 12. 11(화) 10:00 ~

○ 장    소 : 여의도 샛강 분류부(상류) 주변 공사현장

○ 참 석 자

- 발주청(검사자) : 생태공원과(녹지6급 장창수, 토목7급 이나영)

- 건설사업관리   : 서울시설공단(공사감독처)

- 유지관리부서   : 녹지관리과(수목), 공원사업과(파크골프장)

- 외부전문가     : 2030 한강 자연성 회복사업 자문단 등

□ 한봉호 서울시립대 교수 / 이삼희 한국건설기술연구원 선임연구위원

□ 염형철 사회적협동조합 한강 대표

- 시 공 사       : 이화종합건설 및 성우건설 현장대리인

- 기    타       : 설계사(동부엔지니어링)

○ 예비준공검사 내용

- 준공기한 내 준공가능 여부 및 미진 사항의 사전 보완

- 인계·인수 관련 사전 보완사항 점검

- 정산설계도서 등에 의하여 검사하며 검사내용은 준공검사에 준하여 철저하게 시행

□ 준공된 공사가 설계서대로 시공되었는지 여부

□ 지급자재 적정사용 여부 등

□ 항후계획

○ 예비 준공검사 후 보완사항은 시공자에게 보완 지시하고, 준공검사 시 이를 확인할 수 있도록 서울시설공단(공사감독처)에 검사결과 통보

○ 시공자는 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완한 후 서울시설공단(공사감독처) 확인을 받은 후 준공 검사원 제출.