문서번호	급수운영과-24896
결재일자	2018.12.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
류태현	강동길	12/11 이성환
협 조

설계변경 심의결과 보고

[2018년 낙성대배수지외 12개 항청소 용역]

2018. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 결과 보고

[2018년 낙성대배수지외 12개 항청소 용역]

우리사업소에서 시행중인「2018년 낙성대배수지외 12개소 항청소 용역(연간단가)」에 대하여 다음과 같이 자체 설계변경 심의를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 낙성대배수지외 12개소 항청소 용역

○ 계약기간 : 2018. 4. 23. ~ 2018. 12. 15.

○ 계 약 자 : (사)드림피아  대표자 박노경

○ 공사개요

구 분	당 초	변 경	비 고
공사개요	배수지항 청소 256,808㎡	배수지항 청소 243,353㎡
계약금액	금219,874,350원	금192,984,000원

□ 설계변경 심의위원회 개최 현황

○ 일    시 : 2018년 12월 11일(화) 10:00

○ 장    소 : 3층 급수운영과 회의실

○ 참석 인원 : 총 6인

- 위원장 급수운영과장, 심의위원 시설관리과 시설6급 권승계외 2명,

간사 급수운영과 시설6급 강동길, 업무담당자 시설6급 류태현

○ 심의내용 : 공종별 물량 증 ․ 감 및 제비율 감액 등

□ 심의결과

○ 의결내용 : 본안통과

- 물량 증감 등에 대한 일위대가에 대한 검토 : 적정

- 내역서 및 제비율에 대한 검토 : 적정

□ 향후계획

○ 설계변경 심의위원회 심의결과에 따라 본안대로 설계변경 시행

따로붙임  1. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.