문서번호	기전설비과-9472
결재일자	2018.12.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	12/11 유성종
협조

- 우면산가압장 급수체계 개선 -

세출예산 사고이월 계획 보고

2018. 12.

상수도사업본부

【생산부】

- 우면산가압장 급수체계 개선 -

세출예산 사고이월 계획 보고

우리 본부에서 추진중인 우면산가압장 급수체계 개선 사업의‘양재가압장 천장크레인 제작구매설치’건을 선행공정 일정변경에 따라 사고이월함

□ 현   황

◯ 사 업 명 : 양재가압장 천장크레인 제작구매설치

◯ 계 약 자 : ****************

◯ 계약금액 : 금35,426,030원

◯ 계약기간 : 2018.07.05.~2018.12.20.

□ 사고이월 사유

◯ 선행공정 지연에 따른 납품기한 연장

• 양재가압장 구조물 공사의 일정변경에 따라 상부 슬라브에 설치 예정인         천장크레인 설치를 연기함

◯ 계약기간 : 증192일 연장

• 변경 : 2018.07.05.~2019.06.30.

◯ 사고이월 금액 : 금35,426,030원

• 예산과목 : 자본적지출,비가동설비자산취득,건설중인자산,시설비및부대비,시설비

(사업명 : 우면산가압장 급수체계 개선)

□ 행정사항

◯ 해당사업의 미집행 예산을 사고이월 조치함.

붙임  1. 사고이월요구서         1부.

2. 사고이월 사업별명세서  1부.  끝.