문서번호	기전과-6048
결재일자	2018.12.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김용문		12/11 임태수
협조

『2018년 안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가』

제3차 작업지시 완료 및 실정 보고

2018. 12.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2018년 안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가』

제3차 작업지시 완료 및 실정 보고

2018년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사 제3차 작업지시와 관련하여, 책임감리원으로부터 제출된 공사 완료 및 실정보고에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

		관련근거

〇 3차 작업지시

- 3차 작업지시 : 기전과-4459(2018.9.14.)

- 3차 작업지시(변경) : 기전과-4459(2018.9.19.)

- 3차 작업지시(추가1) : 기전과-5116(2018.10.24)

- 3차 작업지시(추가2) : 기전과-5359(2018.11.05)

- 3차 작업지시(추가3) : 기전과-5512(2018.11.13)

〇 감리업체

- 2018년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)-3차작업 완료보고

⇒ ㈜트래픽스 TR-본-1215(2018.12.10)

		사업개요

〇 사 업 명 : 2018년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)

〇 사업위치 : 동작구, 관악구, 금천구, 서초구, 영등포구일부 등

〇 공사내용 : 관내 교통안전표지 설치 및 유지보수

〇 계약금액 : ************

〇 계약업체 : ***************

		3차 작업지시

〇 제3차 작업지시 물량 : 137건

◼ 작업기간 : 2018. 9. 17. ~ 12. 10.

◼ 3차 작업내용

- 경찰청요청(규제) : 53건

- 일상 유지보수 : 84건

		작업완료 및 실정보고

〇 3차 작업지시 및 결과 : 137건 중 137건 완료

지시 번호	위 치	지시내용	작업 결과	비고
3-1	영등포구 여의교 (지명표지 노선 도안수정)	.도안수정------ 2(도안수정)	완료
3-2	서초구 잠원동 77 (횡단보도 표지)	.횡단보도표지 노후 교체 (횡단보도 전방으로 이전 설치)	완료
3-3	강남구 압구정동 394 (한남IC)	.좌측통행 및 충돌방지표지 교체- 1조 (탈색 및 노후)	완료
3-4	금천구 독산동 472-8 (좌회전 감응)	.보조표지(좌회전감응) -- 1(신)	완료
3-5	서초구 서초동 1748-11 (서초고등학교 부근)	.보조표지(좌회전감응) -- 1(신)	완료
3-6	영등포구 신길동 2798 (신풍역)	.보조표지(좌회전감응) -- 1(신)	완료
3-7	동작구 상도동 518-1 (상도전통시장 입구측)	.횡단보도표지 및 지주설치- 1식	완료
3-8	관악구 신림동 22 (관악재활용센터 앞)	.부착대교체(노후부식) ----1식 (표지 재사용)	완료
3-9	동작구 노량진동 13-8 (노량진고가차도 노들로 입구측)	.진입금지+보조표지 -- 1조(신) (본표지+보조)	완료
3-10	동작구 노량진동 153-18 (노량진 119안전센터 앞)	.진입금지+보조표지 -- 1조(신) (전주설치)	완료

〇 1~2차 작업지시 사항 중 미조치 사항 작업완료 : 4건

지시번호	위 치	지시내용	작업 결과	실정보고
1-10 (1차)	서초구 잠원동 87-1 (신사역 4번출구 측)	#224(속도60) 탈색 --- 1(교)	완료	신분당선 지하철공사 진입로 확보
1-26 (1차)	금천구 가산동 가산디지털1로 가산동 한국훼스토 빌딩 앞	#311(유턴)+#407(보조)- 1조(교)	완료	노면설치완료
1-50 (1차)	서초구 서초서 정문앞 R (반포대로)	#311(유턴)+#407(보조)- 1(신) #407(판교체) --- 1(교체)	완료	신호등설치 완료
1-21 (1차)	동작구 대방동 여의대방로36길 100-1 인근	#322(횡단보도, 중2)--- 2(신) #322(정주식) ---- 2(철)	미완료	신호기 미설치
2-17 (2차)	서울 관악구 봉천로 202 신림소방119센터 교차로 (교통사고 잦은곳)	횡단보도(오각) ------- 2(신) 직진/우회전금지 ------- 1(신)	완료	일부완료 - 가로등 미설치 및 안전지대 노면 미확정
		충돌방지— 1(신) ⇒ 가로등 미설치 충돌방지/우측면통행 —1(신) ⇒ 안전지대	미완료

〇 예산집행 금액 검토                             (단위 : 원)

구 분		계약금액	기성금액			계약잔액	비고
			1차 기성금액 (제1차작업)	2차 기성예정금액 (제2,3차작업)	누계
도급비	공급가액	75,855,228	27,424,146	48,431,082	75,855,228	-
	부가가치세	7,585,522	2,742,414	4,843,108	7,585,522	-
	계	83,440,750	30,166,560	53,274,190	83,440,750	-

〇 책임감리원 기술검토 의견

- 금회 제3차 작업지시 137건 중 137건을 완료 및 이전 작업지시 미완료 사항 중 작업 가능한 4건을 완료하였으며,

- 금년도 전체 작업지시(1∼3차) 222건 중 220건을 완료하였으며, 미완료 2건은 내년도 작업여건에 따라 공사 시행함이 타당함.

		보고자 의견

〇 책임감리원 실정보고에 대한 검토결과,

- 제3차 작업지시한 137건 모두 완료하였으며, 제1차, 2차 작업지시 미완료 분 6건 중 4건 완료하였음.

- 금년도 미완료 분 2건은 작업여건이 되는 내년도에 공사시행하는 것이 타당하다고 사료됨.

- 따라서, 책임감리원 실정보고는 적정함으로 실정보고에 대해 승인통보하고자 함.

〇 금년도 작업지시 분에 대해 계약 물량변경에 따른 설계변경 후 준공처리코자 함.

붙 임 : 책임감리원 실정보고서 1부.  끝.