문서번호	급수운영과-19433
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
김병주		12/12 박희철
협 조

준공기한 연기보고

(역삼동 810-1호, 신설-203)

2018. 12.

강남수도사업소

준공기한 연기보고

1. 현    황

○ 공사위치: 강남구 **********

○ 작업지시: 신설-203

○ 공사개요: 신설(D=30mm, L=6m)

○ 공사기간: 2018. 11. 27. ~ 2018. 10. 3.

2. 보 고 내 용

○ 상기 위치의 신축공사 지연으로 보호통 부설 위치에 자재물 적치로 인하여 수요가로부터 본 급수공사에 대하여 공사기간 연기를 요청한 사항임.

3. 조치의견

○ 상기 보고내용에 의거 현재 작업지시한 공사건에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

․ 당초: 2018. 11. 27. ~ 2018. 10. 3.

․ 변경: 2018. 11. 27. ~ 2018. 12. 30.

○ 지체상금 부과여부: 미부과.  끝.