투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(야간할증 정산보고 건 재검토 요청)

1.업무지시현장 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K) 주식회사 선진엔지니

어링종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2018-12-12 14:12:52

3.지 시 내 용

1) 지감922-18-560호(2018.12.10.)와 관련입니다.

2) 서울지하철 9호선3단계 922공구 건설공사 중 1번출입구 및 환기구공사시 반영한 야간할증 정산보고 건에 대하여 검토한바,

3) 야간 할증은 야간공사에 수행한 물량에 한하여 할증을 적용하는 것이 타당할것으로 사료되는 바, 재검토하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							임경태			토목2과장					12/12 방영복
협조자				주무관						안태현
시행			도시철도토목부-14451									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 도시철도토목부															/
전화		772-7221						/전송			772-7306					/	lgt2004@seoul.go.kr												/	대시민공개