문서번호	교량안전과-21805
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이회진		이홍재	12/12 김종호
협조

- 2018년 보라매고가 보수공사 -

설계변경(최종) 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

- 2018년 보라매고가 보수공사 -

설계변경(최종) 시행계획 보고

2018년 보라매고가 보수공사 설계변경(최종)시행 및 향후 추진계획을

보고 드림

Ⅰ		근 거

□ 2018년 보라매고가 보수공사 설계변경 자문회의 결과 보고

(교량안전과-21766, ‘18.12.12)

□ 설계변경(제1회) 검토의견서 제출(2018년 보라매고가 보수공사)

(감리 18-1294, ‘18.12.10)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2018년 보라매고가 보수공사

□ 사 업 비 : ***********(배정액)

□ 계 약 일 : 2018. 05. 14

□ 착 공 일 : 2018. 05. 18

□ 준공기한 : 2019. 01. 10

□ 공사내용

○ 교면방수 및 포장 33.46a, 아스팔트균열보수 4,240m,

○ 콘크리트 단면보수 156㎡, 강재도장 2,840㎡ 등

□ 계약상대자 : **********

□ 건설사업관리 :*******

Ⅲ		설계변경 검토 결과

□ 설계변경 적정성 검토

○ 설계변경 도서 및 시공물량, 관련법규에 의거 검토 결과 적정

- 공사계약 일반조건 제19조(설계변경 등)

- 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 제40조의2(국민건강보험료, 노민장기요양보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)

□ 설계변경 사유

○ 신규 공종 및 시공물량 증·감

○ 국민연금보험료 등 제경비 정산

□ 물량 증·감 및 신규비목 단가

○ 증·감 된 물량은 계약단가를 적용하고

○ 신규비목(계약상대자의 책임 없는 사유 포함)은 설계변경 당시 산정

단가에 낙찰률(86.645%)를 적용하기로 협의하여 적용

□ 제경비 정산

○ 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료는 일용직 근로자 20일             미만 근무로 정산 제외

○ 건설기계 대여금 지급보증서 발급금액 및 하도급대금 지급보증서                발급 수수료는 직불합의서 제출로 정산 제외

□ 주요공종 물량 증.감 내역

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 , 감
교면방수 및 포장	절삭포장	a	*****	*****	********
아스팔트균열보수	야간,가열식, GUSS	m	*	*****	********
콘크리트 단면보수	t=10㎜	㎡	***	***	********
콘크리트 단면보수	t=20㎜	㎡	*	***	********
강재도장	중방식	㎡	*****	*****	********

□ 공사비 증.감 내역

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	*************	*************	***************
도 급 비	*************	*************	***************
관 급 비	**********	**********	*
이 전 비 (폐기물처리 등)	***********	**********	***************

Ⅳ		조 치 방 안

□ 상기 검토결과에 따라 설계변경 및 변경계약 추진

Ⅴ		향 후 계 획

□ ‘18. 12. 14 : 설계변경 및 변경계약

□ ‘18. 12. 31 : 공사 준공

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 검토의견서(감리) 1부.

3. 설계변경 자문회의 결과 1부. 끝.