문서번호	건축부-18029
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김완선		박범규	12/12 임인구
협조
	주무관		김동석

『서울시 근로자복지관 증축공사』

건설폐기물 물량변경 실정보고 검토

2018. 12.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서울시 근로자복지관 증축공사』

건설폐기물 수량변경 실정보고 검토

「서울시 근로자복지관 증축공사」와 관련하여 철거부분 추가 및 폐기물처리

물량 증가에 대한 실정보고가 제출되어 검토 보고 드림

공사개요

○ 용 역 명 : 서울시 근로자복지관 증축공사

○ 위    치 : 영등포구 국회대로 44길 10 (영등포동, 한국노총 서울지역지부)

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 3,768.24㎡

○ 공사기간 : `18.10. 1. ~ `19. 5.31.

○ 계약금액 : ************

○ 시공사/감리단 : ㈜우성토건 외 1개사 / ㈜영진엔지니어링 외 1개사

추진경위

○ `17. 3. 15. : 근로자복지관 증축 변경 추진계획 수립

○ `17. 9. 14. : 근로자복지관 증축을 위한 설계 및 공사발주 의뢰

○ `18. 3. 14.~ `18. 9. 19. : 설계용역

○ `18. 9. 20. : 공사 및 건설사업관리용역 계약체결

○ `18. 10. 1. : 공사 착수

○ `18. 10.25. : 건설폐기물 및 석면 처리용역 계약체결

위 치 도	조 감 도

실정보고 내용

○ 관련근거

- 「공사계약 일반조건」제19조(설계변경 등)

· 제19조의2(설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)

· 제19조의3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)

- 「철거공사 수량변경 실정보고 검토 보고」영진근복 제18-24호(2018. 11. 13.)

○ 검토 내용

- 철거공사 중 현장 상이 및 누락으로 인한 철거 및 폐기물처리 물량 증·감

- 폐기물처리 소운반 및 상차비가 누락 물량 내역반영 등

공사비 증감 내역

○ 철거공사 공사비                                                 (단위 : 천원)

*********		**********			**
		****	****	***
**** ***	**********	******	******	**********	*** ***********
	********	*	*****	**********
	********	*	***	**********
	*******	******	******	**********
**** ***	**************	******	******	**********
*******		******	******	**********

○ 건설폐기물 처리비                                               (단위 : 천원)

******		*****	********			**
			****	****	***
**** ***	****** *****	*******	******	******	*********	*** ***********
	***** *****	*******************	*****	*****	*********
	*******		******	******	*********
**** ***	**************		*****	*****	*********
*********			******	******	*********

책임건설사업관리기술자 의견

○ 철거공사에 수량산출 추가 등 철거공사비 증·감 및 폐기물처리비와 운반비, 상차비를 변경하여 공사비에 반영함이 타당하다고 판단됨

처리 의견

○ 건설사업관리자의 검토의견대로 실정보고 승인을 처리

○ 계약금액 조정시 최종 공사물량 및 금액을 확정하고, 증가된 폐기물처리 물량은 건설폐기물처리용역에 반영한 변경계약을 체결하여 본 공사추진에 차질이 없도록 조치하고자 함.

붙임 : 실정보고 검토 보고 1부.  끝.