문서번호	건축부-17961
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
이원기		유현수	12/12 임인구
협조

『서남물재생센터 3차총인처리시설 설치공사(건축)』

관급자재(샌드위치패널) 물량변경 검토보고

2018. 12.

도시기반시설본부

(건축부)

『서남물재생센터 3차총인처리시설 설치공사(건축)』

관급자재(샌드위치패널) 물량변경 검토보고

『서남물재생센터 3차총인처리시설 설치공사(건축)』관련, 관급자재(샌드위치패널) 물량변경이 있어 책임건설사업관리기술자의 실정보고에 따른 검토결과를 보고함.

1		공사개요

위    치 : 서울특별시 강서구 양천로 201길(마곡동 91, 74번지)

규    모 : 총인처리시설 Q=737,000㎥,

(건축) 소독시설, 약품펌프동 등(총6개동+토목구조물)

연면적 5,532.99㎡ 추가 신설

공사기간 : 2017. 09.01~2020. 04. 30일(총체:973일)

**********************************

시 공 사 : 롯데건설(주) 80%, (주)대흥종합건설 20%

감 리 자 : (주)동해종합기술공사 외 3개사

2		실정보고 내용

관련근거

- 서남총인(감) 제2018-243(2018.12.11)호 : 관급자재(건축) 물량변경 계약요청 검토보고(서남총인)

- 롯건서남 제18-623(2018.12.07)호 : 관급자재 (샌드창고) 변경 요청의건

실정보고 사유

-외벽패널(75mm)은 당초 건축물 산출높이를 13.80m로 되었으나, 설계높이가 12.30m로

되어있어 생산자재는 1.0m폭의 규격제품이므로 설계높이 12.30m에서 13.0m로 높이를

산출하고, 여기에 건축물 외벽둘레길이를 곱한값으로 수량을 적용 하였음.

-시공은 설계도면 높이 수치인 12.30m로 산출 하였음.

-정면 및 배면 파라펫패널의 산출길이는 평면길이 14.80m에 파라펫높이 1.0m를  곱한값에

박공(삼각형)지붕면적을 공제한 수량이 시공수량이나 관급자재는 경사면 절단을 하면 자재손실이

발생하여 박공 지붕면적을 공제를 하지 않았음.

- 좌측면 및 우측면은 처마홈통이 있는 길이방향으로 파라펫패널의 산출은 처마홈통(400mm+100mm)+

파라펫높이 1,000mm+파라펫두겁 300mm합한값이 1.8m로, 생산자재는 폭1.8m에서 폭2.0m에

둘레길이를 곱한값으로 수량을 적용 하였음.

변경내용 및 관급자재 추가비용 검토

- 변경 내용

***	***	**	*********			*********			********
			**	**	**	**	**	**	**	**
******	*****	*	***	******	**********	***	******	**********	***	**********
	** ********	*	**	******	*********	***	******	*********	**	*******
	*** ****	*	***	******	**********	***	******	**********	*	*
*****		*	*		*******	*		*******		******
*****					**********			**********	**********

*****************************

(단위 : 원)

***	***	***	***	***
**** ********	**********	**********	***********
*****	*******	*******	*******
****	**********	**********	***********

3		감리자 검토의견

샌드위치 패널 관급자재 업체인 에스와이테크의 계약내용과 실시설계도면이 일치하지 않으므로 시공도면에 맞추어 물량변경 하는 것이 타당하다고 판단됨.

4		처리의견

책임건설사업관리기술자의 검토 의견에 따라 관급자재의 변경된 물량에 대하여 총무부에 계약변경 의뢰코자 함.

붙 임 : 관급자재(건축) 물량변경 계약요청 검토보고(서남총인).  끝.